문서번호	도로보수과-5564
결재일자	2020.6.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
류승휘		강종훈	06/18 김영철
협 조
	주무관			이상하

「2020년 관내 포장도로불량맨홀정비공사」

작업지시 검토 보고(제1차)

2020. 6.

서부도로사업소

(도로보수과)

「2020년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사」

작업지시 검토 보고(제1차)

2020년 불량맨홀정비공사(연간단가)-서부 계약을 체결하고 불량맨홀 정비 1차 작업지시를 통해 서울시민 불편해소 및 안전사고를 사전에 예방하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 불량맨홀정비공사(연간단가)-서부

○ 계약기간 : 2020.06.10. ~ 12.31.

○ 시 공 사 : ************

○ 도 급 비 : **********************************

□ 작업지시 내용

○ 사전협의 물량 : 122개소

○ 작업지시 수량 : 120개소

- 맨홀 정기점검(외관조사)용역 결과 및 민원사항을 조사하여 사전협의한 맨홀 120개소에 대하여 정비.(관리기관 사전협의 결과 2개소 제외)

- 작업지시 내역

▸ 맨홀관리기관 정비요청                    : 4개소

▸ 민원발생(불량맨홀 정비요청)              : 20개소

▸ 2020년 도로순찰                        : 1개소

▸ 2019년 맨홀정기점검                     : 95개소

- 작업수량은 노후포장, 굴착복구 도로정비 구간 및 철개 수급 지연으로 인한 물량 변동이 있을 수 있음.

□ 조치계획

○ 제1차 작업지시 물량인 120개소를 연간단가 계약업체로 하여금 조속히 정비토록 하여 시민 고객 불편해소 및 안전사고를 사전에 예방코자 함.

○ 제1차 작업지시

- 건    명 : 2020년 불량맨홀정비공사 작업지시(제1차)

- 작업위치 : 중구 소공로 99-1 등 120개소(붙임 참조)

- 작업기간 : 2020.06.26. ~ 2020.08.10.

- 필요금액 : **************************

- 공종 및 물량 : 총 120개소

구 분	수 량	구 분	수 량
하수도	19	상수도	38
통 신	41	전 기	19
소화전	2	서울교통공사	1

- 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공사명	도급비	기 집행액	금회 집행액	집행잔액
불량맨홀 정비공사 (연간단가) 제1차	*******	-	*******	*******

□ 향후계획

○ ‘20.06.24. : 시험시공 및 결과보고

○ ‘20.06.26. : 작업지시 및 공사시행

○ ‘20.08.10. : 작업완료 및 결과보고

붙임 1. 작업지시 내역서(제1차) 1부.

2. 작업지시 위치도 및 사진 1부(별도첨부).  끝.