문서번호	교통정보과-9248
결재일자	2020.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운수정보팀장	교통정보과장
안종휘		김필래	06/18 이수진
협 조
	주차질서개선팀장			김진경
	주무관			류미숙
	주무관			안재성

불법주정차 통합플랫폼 서비스 개시 일정조정 보고

2020. 6.

도시교통실

(교통정보과)

불법주정차 통합플랫폼 서비스 개시 일정조정 보고

「불법주정차 통합플랫폼」순차적 오픈계획에 의거 서비스 개시 중, 자치구 사정에 의한 교육연기 등의 사유로 서비스 개시 일정 조정보고

□ 서비스 일정 조정배경 및 추진방향

○ 자치구 내부사정으로 서비스 일정 변경요구에 합리적 일정 조정

- 자치구별 행정감사 기간으로 교육연기 요청, 코로나19 감염방지 거리두기

- 고정형CCTV 단속 SW업체 지원일정 연기(자치구 신규 사업발주 등)

□구로, 강남, 도봉, 중랑, 관악, 송파는 제조사 연계지원 일정 미정

□강서는 도보단속 자체 운영 시스템 구축 중

- 자치구 현장단속 앱 설치 지연 등 당초 서비스 대상 및 일정 조정필요

○ 추진방향

- 교육, 현장단속 앱설치, 고정형CCTV 표준화 지원완료, 자치구 우선 시범운영

- 시범운영 + 2일 후 정식서비스 → 다양한 행정요구에 유연하게 대응

□ 그간 서비스 개시 추진사항

【1차 서비스 개시(5.24)】서비스 주소: http://98.42.34.62:8088

○ 내 용 : 단속행정 시스템(시·자치구)

○ 대 상 : 서울시 및 종로, 서초, 용산, 광진, 동대문, 노원 등 6개구

○ 서비스 개시결과

구 분		도보(현장단속앱)	이동형 CCTV	고정형CCTV	서비스 개시
종로구		*********	****	********	*******
서초구		*********	****	*********	*******
용산구		****	****	********	************
광진구		*********************************************************
동대문구		*********************************************************
노원구		*****	*	**********************
서울시	교통정보과	*	*	*******************	************
	강북·강남지역대	*****		*	*****
	운수지도2팀	*****	*	*	*****

【2차 서비스 개시(6.14)】→ 변경 : 6.22~26

○ 서비스 개시 조정(안): 성동, 성북, 영등포 등

구분	교육	도보 (현장단속앱)	이동형 CCTV	고정형 CCTV 연계	서비스 개시
성동구	**	****	****	********* ********	*********************
성북구	**	****	****	********* ********
영등포구	************			******** ********
양천구	************			******** ********	*********************
동작구	************			******** ********	*********************
중구	**	**** ***************	****	************	************
강동	************			********	*********************

※ 중랑, 마포, 양천은 고정형CCTV 업체지원일정 지연, 교육일정 연기 등 자치구 내부사정

및 요청에 의해 추후로 연기

□ 3~5차 서비스 개시 조정(안) - 단속행정시스템 순차적

○ 3차 서비스 개시(6.29.~7.3.): 금천, 서대문, 은평

구분	교육	도보 (현장단속앱)	이동형 CCTV	고정형 CCTV 연계	서비스 개시
금천	***********			******** ********	*********************
서대문	***********			******** ********	*********************
은평	***********			***** *******************	*********************

○ 4차 서비스 개시(7.6.~7.10.): 강북, 마포

구분	교육	도보 (현장단속앱)	이동형 CCTV	고정형 CCTV 연계	서비스 개시
강북	************			****** ****************	********************
마포	**********			************ **********	*********** ********

○ 5차 서비스 개시(일정협의 중) : 중랑, 관악, 송파 등 7개구

구분	교육	도보(현장단속앱)	이동형 CCTV	고정형 CCTV 연계	서비스 개시
①구로	***********			****** **********	**********************
②강남	***********			****** **********
③도봉	***********			****** **********
④중랑	***********			****** ********
⑤관악	***********			****** ********
⑥송파	************			************ **********
⑦강서	**	***************	******	************ **********	********************

※ *************************************

□ 최종 서비스 개시

○ 대상

- 서울시 단속조회시스템: http://cartax.seoul.go.kr

※ 불법주정차, 버스전용차로, 의무보험, 정기검사, 자동차세 확인

- 단속관리시스템: ***********************

※ 통계관리, 성과관리, 리포팅 기능 등

○ 서비스 일시: ’20.7.13.(월) 09:00

<<고려사항>>

▸서비스 대상 통합플랫폼에서 자료 삭제(초기화)

※ 삭제 전 ‘불법주정차 통합플랫폼’에서 대사여부 확인 필요

▸서비스 개시대상

※ 자치구→교통위반관리시스템 단속자료 전송기능 차단(대사담당에게 사전 안내)

▸기능개선, 오류사항 관련 ‘핼프데스크’ 운영 적극 지원

□ 향후계획

○ 단속조회시스템 취약점 점검	: ’20. 6월 중

○ 언론보도	: ’20. 7. 9.(목) 조간(예정).