문서번호	갈등조정담당관-5377
결재일자	2020.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	갈등조정팀장	갈등조정담당관
노대호	윤병수	06/19 홍수정

오현적환장 관련 갈등영향분석 및 조정용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2020. 6. 19.

서울혁신기획관

(갈등조정담당관)

오현적환장 관련 갈등영향분석 및 조정용역 - 준공기한 연기 검토 보고

용역기간 중 코로나-19 사태에 따른 대화협의체 개최가 지연됨에 따라 준공기한을 연기하고자 함

1		용역 개요

□ 용 역 명 : 오현적환장 관련 갈등영향분석 및 조정용역

□ 용역기간 : ‘19. 10. 25. ~ ‘20. 6. 24.

□ 계약금액 : 39,380천원

□ 계 약 자 : (사)한국갈등학회 대표 김학린

2		추진 경과

□ ‘19. 10. 25. : 용역 착수

□ ‘19. 11. 04. : 착수보고회 개최

□ ‘20. 02. 11. : 중간보고회 개최

□ ‘20. 06. 12. : 대화협의체 1차회의(번동 동문아파트 회의실)

3		기한 연장 내용

□ 연기사유

- 과업기간 중 코로나-19 사태에 따른 사회적거리두기(‘20.3.22~5.5) 와 강화된 생활속거리두기(‘20.5.6~)로 인하여 이해당사자 주민대표와 강북구청간 대화협의체 개최가 지연됨에 따라 준공기한 연기가 필요한 실정임

- 강북구 청소행정과-17582(2020.6.15.)호로서 대화협의체 2,3차 진행을 위한 과업기간 연기요청

□ 변경내용

구 분	당 초	변 경
용역기간	‘19. 10. 25. ~ ‘20. 6. 24.	‘19. 10. 25 ~ ‘20. 7. 31.
용역금액	변경 없음

□ 귀책사유 : 서울특별시

4		조치계획

□  위와 같이 용역기간 연장사유에 의해 준공기한을 연기하여 향후 대화협의체 회의를 추가 진행하고자 함

붙임 : 1. 강북구 연기요청 공문 1부.

2. 용역사 연기요청 공문 및 합의각서 각 1부.  끝.