문서번호	건축부-10380
결재일자	2020.6.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김완선		신추교	06/19 代유현수
협조

『남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)』

건강가정지원센터 추가공사에 따른 실정보고 검토

2020. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)』

건강가정지원센터 추가공사에 따른 실정보고 검토

「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」으로 추가 발생한 건강가정지원센터 옥외데크공사 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고  사항에 대한 검토 결과를 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 남산예장자락 건강가정지원센터 옥외데크공사

○ 위    치 : 서울시 중구 예장동 소파로 4-6(소파로 4길 6)

○ 규    모 : 2층 출입문 및 옥외데크 설치, 옥상 파고라 및 난간 설치

○ 공사금액 : *************

○ 공사기간 : ***********************

○ 시 공 사 : KBI산업개발㈜ 외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜동성엔지니어링건축사사무소 외 2개사

Ⅱ		추 진 경 위

○ `18. 04. 10. : 건강가정지원센터 앞 옹벽 철거 사전 안내(방재시설부)

○ `18. 04. 18. : 건강가정지원센터 요구사항에 대한 조치계획 검토보고(방재시설부)

○ `18. 04. 26. : 건강가정지원센터 도로 일부편입에 따른 조치계획 보고(공공재생과)

○ `20. 03. 13. : 건강가정지원센터 옥외데크공사 실시설계 완료

○ `20. 05. 20. : 단가 협의율(설계변경) 조정 회의 (1차)

○ `20. 05. 29. : 건강가정지원센터 정화조 악취 발생으로 민원 제기(가족담당관)

- 조치 사항 : 정화조 배기구에 무동력 배출기 설치, 맨홀에 고무매트 설치.

○ `20. 06. 03. : 단가 협의율(설계변경) 조정 회의 (2차)

Ⅲ		실정보고 내용

○ 관련규정 및 근거

- 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경, 제7절 계약금액의 조정

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- 남산예장 감리 제2020-301호(2020.06.11.) 건강가정지원센터 옥외데크추가공사에 따른 실정보고 승인 요청

○ 실정보고 사유

- 건강가정지원센터 앞 신설도로 편입 부분의 보강토 옹벽공사로 인해 건강가정지원센터 1층 현관 진입부 축소로 도로선형에 따라 2층 진입 가능한 옥외진입데크 공사 추가 반영 요구

Ⅳ		건설사업관리단 검토 의견

○ 공사 금액                                                       (단위: 원)

구 분	설 계 가	도급예정가	증 감	비 고
직접공사비	**********	**********	***********
2. 간접공사비	**********	**********	**********
3. 공급가액	**********	**********	***********
4. 부가가치세	*********	*********	**********
5. 도 급 액	**********	***********	***********
6. 폐기물처리비	******	******	*
총사업비	**********	***********	***********

※ 붙임 실정보고 내역 등 관련서류 참조

○ 단가 적용 기준(공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정)

- ***********************************

- *************************************

- ****************************

○ 검토 의견

- ***********************************************************************************

- *************************

Ⅴ		처리의견

○ 책임건설사업관리기술인 검토 의견과 같이 내용이 적정함으로 실정보고 승인.

○ 관련 법령 및 우리본부 설계변경 절차에 따라 설계변경 금액 결정.

붙 임 : 실정 보고 관련 서류 1부.  끝.