“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계용역 변경(2차분)계약 의뢰

1. 광화문광장추진단-0000호(2019.11.29.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진하고 있는 『새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 변경(2차분) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 새로운 광화문광장 조성 기본 및 실시설계 용역

나. 계약자 : ㈜씨에이조경기술사사무소 대표 진양교, ㈜유신 대표 성낙일, ㈜선인터라인건축사무소 대표 김희진

다. 용역기간 : 2019.03.22. ~ 2020.06.22.(총차)

라. 계약금액 : 총차 금4,539,527,000원정(2차 금1,264,727,000원)

******************************

바. 변경내역(계약금액변경)

- 계약 차수별 변경내역                                                  (단위 ; 원)

사 업 명	당 초	변 경	증 감	비고(용역기간)
총차	4,539,527,000	4,939,527,000	400,000,000	2019.03.22.~2020.06.22.
1차	3,274,800,000	3,274,800,000	-	2019.03.22.~2020.03.22.
2차	1,264,727,000	1,664,727,000	400,000,000	2019.11.26.~2020.06.22.

- 사업별 변경내역                                                       (단위 ; 원)

사 업 명	당 초	변 경	증 감	비고(추가과업)
계	4,539,527,000	4,939,527,000	400,000,000	-
경복궁 광화문 월대	1,739,800,000	1,739,800,000	-	-
광화문 시민광장	2,799,727,000	2,799,727,000	-	-
내자동 지하보차도 리모델링	-	400,000,000	400,000,000	리모델링 기본 및 실시설계

사. 예산과목

- 경복궁 광화문 월대 : 광화문일대 역사성 장소성 회복, 시민중심대표 공간조성, 경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비, 시설비(401-01)

- 광화문 시민광장 조성 : 광화문일대 역사성 장소성 회복, 시민중심대표 공간조성, 광화문 시민광장 조성, 시설비(401-01)

- 내자동 지하보차도 리모델링 : 광화문일대 역사성 장소성 회복, 시민중심대표 공간조성, 내자동 지하보차도 리모델링, 시설비(401-01)

*****************

*********************

*********************

*****************************  끝.

	광화문광장추진단장
주무관	황서현		광장계획팀장	이강수		계약1팀장	代신충수		광화문광장사업반장	12/02 임창수
협조자	재무과장	천명철
시행	광화문광장추진단-13293	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩9층	/
전화	02-2133-2030	/전송	02-2133-1080	/	spinosus@seoul.go.kr	/	부분공개(5)