문서번호	급수운영과-9914
결재일자	2020.6.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
차승현		전동근	06/22 최춘근
협 조

설계변경(3차-최종) 심사요청에 따른 보고 (2019년 수서동외 14개동 상수도공사)

2020년 6월

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경(3차-최종) 심사요청에 따른 보고

우리사업소가 시행하는 “2019년 수서동외 14개동 상수도공사”의 계약물량 증․감 등 변경사항이 발생되어 본부 안전총괄과에 설계변경 심사요청하고자 함.

□  공사개요

□ 공 사 명: 2019년 수서동외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요: D=13~300mm, L=2,661m

□ 계약기간: 2019.05.23. ~ 2020.06.30

□ 도 급 비: ***************

□ 도 급 자: **************강신환

□  설계변경 현황

□ 설계변경 사유: 시공물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 계약물량 조정

□ 주요 시공물량 증․감 내역

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
토 공 (주간)	되메우기(인력)	㎥	***	*****	*****
	잔토상차(집하장)	㎥	*****	*****	*****
	인력터파기(용수,협소), 견질토사 0-1m	㎥	*****	*****	*****
	아스팔트 포장절단	m	*****	*****	*****
부설공 (주간)	주름마디 스텐관 부설공(D20)	m	***	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D25)	m	***	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D30)	m	***	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D40)	m	***	***	****
	주름마디 스텐관 부설공(D50)	m	***	***	***
	벽체계량기설치공(15mm)	개소	***	***	******

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
부설공 (주간)	상수도관 부설공(D80)	m	*	*	****
	상수도관 부설공(D100)	m	***	***	*****
	상수도관 부설공(D150)	m	***	***	****
	상수도관 부설공(D200)	m	***	***	******
구조물공 (주간)	원형밸브실 설치공(D80)	개소	*	*	***
부대공 (주간)	작업차량(급수공사)	개소	***	***	*****
	안전원	인	***	***	*****

□ 신규공정 발생내역

- 부설공: 제수밸브 부설 및 접합공(300mm, 주간)외 2개 공정

- 사급자재: 부단수활정자관(300/150) 공정

□ 설계변경 내역

구 분	당초 금액	변경 금액	증․감
도 급 비	**************	**************	**************
공급가액	**************	**************	*************
부가가치세	************	************	*************

□  향후 계획

- 계약 물량 증․감 및 신규 공정 발생에 따른 ****************으로 본부 안전총괄과에 설계변경 심사요청하고자함.

붙임 : 설계변경 내역서(3차-최종) 1부.  끝.