문서번호	교통운영과-9771
결재일자	2020.6.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★교통전문관		교통개선팀장	교통운영과장
박평근		김상훈	06/22 강진동
협조

「2020년 도로점용공사장」교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제7차)

2020. 6.

교통운영과

「2020년  도로점용공사장」

교통소통대책 자문회의 결과 보고(소위원회 제7차)

제7차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회(소위원회)를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2020.6.18.(목), 14:00~15:50

○ 참석 위원 : 4명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 3명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : **********************

- 간  사 : 교통개선팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 3건

- 결  과 : 조건부 시행 3건

□ 자문회의 결과

○ 공통사항

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

1) 강남지사 열수송망 성능 보강공사

(2단계, 도곡동 세브란스 사거리~한티역)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
도곡로	‘20.9~’21.4 (152일)	야간(22~06시)	1~3개차로	한국지역난방공사 강남지사

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 장비 제원을 제시하기 바람

- 1~5단계는 통행방법을 교대통행으로 검토하기 바라며, 통제수(모범운전수)를 교육을 통해 배치하고, 교대통행에 따른 대기공간 확보를 위해 정지선을 후퇴하기 바람

- 1단계는 대향차로 활용하여 직진2개차로 확보를 검토하기 바람

- 2단계는 좌회전 폐쇄 등을 검토하기 바람(폐쇄시 우회도로 안내를 하기 바람)

- 해당공사 구간은 학원가, 주택가 등이 밀집되어 있어 야간 공사시 소음 및 학원 이용 학생 등의 안전에 문제가 있으므로 가로 구간은 교통정체를 최소화하는 범위내에서 주간 공사 시행 가능한 구간을 선택하여 제시하기 바람(야간 공사 vs. 주간 공사 분석값 제시하기 바람, 교차로 공사는 야간 시행)

- 주간 공사시 오전 첨두시(출근시간대)는 제외하여 공사를 시행하기 바람

- 공사시 보행도우미를 배치하기 바람

- 11단계는 좌회전을 위한 회전반경 확보를 위해 점유면적에 대한 가각정리를 하기 바람

- 13단계는 안전을 위해 테이퍼를 추가 연장하기 바람

- 사전에 홍보 및 주민협의를 완료하여 공사를 시행하기 바람

2) 세종대로 보행친화 공간 재편사업

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	사업 시행자
세종대로	‘20.7~11 (143일)	24시간	1~2개차로	보행정책과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 사전에 홍보를 철저히 시행하고, 통제수(모범운전수) 및 보행도우미를 배치하여 공사를 시행하기 바람

- 12.2구역 1-2단계 임시버스 정류소 설치시 문화재청과 협의하여 공사를 시행하기 바라며, 활용 불가시 교통운영과와 재협의 하기 바람

- 숭례문 교차로 개선 검토(세종대로 북측 횡단보도를 반폭 이전하고, 남산 소월로에서 세종대로 방향 중앙선을 최대한 맞추고 2개차로 직진은 1차로부터 유도하여 우회전 차량이 상충없이 회전이 가능하도록 하기 바람)

3) 사직터널외 1개소 환경개선공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로 (점용폭)	사업 시행자
사직로 (사직터널)	‘20.6~10 (4개월)	야간(22~06시)	1~2개차로	북부도로사업소 시설보수과

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 2단계 노즈부를 연장하여 시야를 확보하기 바람(금화터널→사직터널)

- 3단계 테이퍼를 연장하기 바람

- 사직터널은 사고가 많은 구간이므로 사전에 공사 안내 및 입간판 설치 등 홍보를 철저히 하여 공사를 시행하기 바람

붙임 : 1. 자문위원 참석명단 1부.

2. 공사업체 참석명단 1부.  끝.