“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행(2019년 서강동외 7개동 상수도공사)

우리과에서 시행중인 『2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여        아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

가. 공  사  명 : 2019년 서강동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약대상자 : ************

다. 공사  기간 : 2019. 06. 10. ~ 2020. 6. 30.

라. 설계변경 금액내역                                             (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공사비		655,976,530	655,851,900	-124,630
도급비	1차수(2019년)	354,876,500	354,876,500	-
	2차수(2020년)	301,100,030	300,975,400	-124,630

마. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증 ․ 감                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
합 계	655,976,530	655,851,900	-124,630
1.토 공	164,100,634	175,847,341	11,746,707	아스팔트포장절단 등
2.부설공	95,001,633	85,757,733	-9,243,900	스테인레스관 부설공 등
3.구조물공	20,753,582	25,909,537	5,155,955	월형밸브실 설치공 등
4.부대공	45,881,721	42,617,167	-3,264,554	가설사무실 설치 등
5.사급자재비	67,904,867	66,761,221	-1,143,646	주름마디 스테인레스강관 등
6.포장공	12,159,179	12,070,773	-88,406	보조기층공 등
7.제경비	250,174,914	246,888,128	-3,286,786

바. 최대정산 이행금액(1회 최대 정산금액) : 금100,000,000원

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급․배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 급배수비, 수선유지교체비

상수도사업비용, 영업비용, 급배수비, 지원사업성시설비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치,

시설비

소방용수시설설치개소수, 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설보수,

시설비

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 사전심의 의결서 1부.

3. 사전심의회 개최 결과 1부.

4. 합의서 1부.

5. 설계변경 검증확인서 1부.  끝.

주무관	김승진		급수관리팀장	김승완		급수운영과장	이병운		서부수도사업소장	06/22 代박달경
협조자
시행	급수운영과-10233	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3646	/전송	02-3146-3689	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)