문서번호	시설관리과-14252
결재일자	2020.6.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
최준혁	유세종	06/23 代이유찬
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고(돈암동 19-94 ~ 643호 외 5개소 배급수관 정비공사)

2020. 06.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

설계변경 심의자료

가. 공 사 명 : 돈암동19-94 ~ 643호 외 5개소 배급수관 정비공사

나. 제    목 : 설계변경심의

다. 일    시 : 2020. 06. 22.(월) 오후 16:00

라. 참 석 자 : 시설관리과장, 6급 유세종, 6급 이유찬, 6급 유형근

시설6급 박장진, 시설6급 이훈재

마. 공사개요

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	13~300mm	1,924m
변 경	13~300mm	1,661m	감) 263m

바. 공사기간 : 2019. 04. 15. ~ 2020. 06. 23.

사. 공사금액

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비 (VAT포함)	533,221,400원	528,321,200원	감 4,900,200원

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 돈암동 19-94 ~ 643호 외 5개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	13~300mm	1,924m
변 경	13~300mm	1,661m	감) 263m

다. 공사기간 : 2019. 04. 15. ~ 2020. 06. 23.

라. 수 급 인 : 풍요산업개발 주식회사 대표 손수길

2. 설계변경 사유보고

가. 공종별 주요 공사비 변경

연번	공 종	주요 변경내용	공사비(증·감)	비고
1	토 공	- 다량의 지작물 간섭으로 인한 증가	증) 11,441천원
2	부 설 공	- 공사구간 추가에 따른 부설연장 증가	증) 7,468천원
3	구조물공	신규 제수밸브 및 철개설치 증가	증) 561천원
4	부대공 및 사급자재	작업일수와 연관된 사용수량 증·감 등	감) 11,048천원
5	보험료 등 제경비 실사용 정산	건강, 연금, 노인장기요양보험료 미정산 퇴직공제부금 미정산 부지임대료 미정산 하도급발급수수료 정산 건설기계대여금 정산 환경보전비 정산	감) 23,814천원	미정산 항목은 준공시 정산
6	산업안전보건 관리비 정산	설계변경 시 안전관리비 조정․계상 방법 적용	감) 831천원	제비율 검증 완료

나. 실정보고에 따른 설계변경

연번	구 분(제목)	주요 변경내용	관 련 근 거
1	공사구간 조정	- 노후관 및 급수거역이 없음. (1구간: D=150mm, L=200m) - 도로폭 협소하고 지장물 과다 및 일부구간 내식성 확보된 닥타일주철관으로 공사제외 (6구간: D=200mm, L=177m) - 도로과 병행공사로 야간에서 주간으로 변경 (2구간: D=100mm, L=125m)	시설관리과 -26274호 (2019.10.15)
2	공사구간 조정	- 내식성이 확보된 닥타일주철관으로 공사제외 (3구간: D=150mm, L=115m) - 도로과 요청으로 보도→차도 변경 (2구간: D=150mm, L=30m)	시설관리과 -31156호 (2019.12.5)
3	공사 추가작업지시	- 1구간, 3구간, 6구간 일부 타절로 인한 추가 작업지시 (1구간 대체구간: D=200mm, L=180m) (3구간 대체구간: D=200mm, L=145m) (6구간 대체구간: D=300mm, L=145m)	시설관리과 -4895호 (2020.3.3)
4	현장여건 변경 및 준공기한 연기	- 추가구간 1구간 중 왕복 2차선 교통량이 많아 주간 → 야간작업 변경 - 추가구간 작업지시에 따른 준공기한 연기	시설관리과 -9608호 (2020.4.27)
5	4구간, 6구간 공사여건 변경, 잔토처리장 변경	- 4구간 계획관로 부설작업을 하고 기존관 관말 연결 작업시행 후 제수변 설치였으나, 기존관 관말이 분기 제수변에 연결되어 있는 상황으로 기존 제수변 존치 - 4구간 시․종점부 경사가 상당하여 공기밸브 설치 - 6구간 주거지 밀집지역으로 단수민원 최소화를 위해 중간밸브 설치 - 발생된 굴착토사가 수도권매립지 토사반입기준에 부적합으로 판정되어 반입불가 회신됨에 따라 잔토처리가 가능한 일반 사토장으로 변경	시설관리과 -13341호 (2020.6.11)
6	5, 6구간 도종변경	- 도종변경에 따라 콘크리트 깨기 및 폐기물 추가 반영	시설관리과 -13883호 (2020.6.18)

3. 주요 공종수량 증․감 발생 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증, 감
관부설	D=20~300mm	m	1,924	1,661	감) 263
각종변실설치	D=80~300mm	개소	55	52	감) 3

4. 공사비 변경

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공 급 가 액	484,746,728	480,292,000	감) 4,454,728
	부가가치세	48,474,672	48,029,200	감) 445,472
	계	533,221,400	528,321,200	감) 4,900,200

5. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증. 감한 일부공종에 대해 계약율 적용

나. 최종설계변경 시행으로 계약금액 변경에 따른 공종, 물량 변동

다. 신공종에 대해 낙찰율 적용

붙 임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 심의위원회 개최 자료 각 1부.  끝.