문서번호	시설관리과-11935
결재일자	2020.6.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
양창진	代양창진	변재홍	06/23 정진일

(신정증압장 모터펌프 제작구매 설치)

납품기한 연기 검토 보고

2020. 6.

강서수도사업소

( 시설관리과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「신정증압장 모터펌프 제작구매 설치」

납품기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 시행중인「신정증압장 모터펌프(30HP) 제작구매 설치」건에 대한 납품기한 연기사유가 발생하여 검토한 결과를 보고 드림.

□ 계약현황

사 업 명	용 량	사업비 (단위:천원)	계약상대자		납품기한
			상호명	대표자
신정증압장 모터펌프 제작구매 설치	30HP×2대	******	*****	***	‘20. 4. 2. ~ ‘20. 7. 1.

□ 연기사유

□ 신정증압장(신월2동) 인입관로 부설 등 추가 공정 발생에 따른 공사기간

확보를 위함

□ 신정증압장 신설 부지(사유지) 소유자와의 토지사용 등 협의기간 확보

□ 지체상금 부과여부

□ 귀책사유 : 강서수도사업소

□ 지체상금 : 미부과

□ 조치의견

□ 상기와 같이 검토한 결과 기한 내 납품이 불가하므로 효율적인 업무 수행을 위하여 아래와 같이 납품기한을 연기하고자 함.

사 업 명	납 품 기 한		계약상대자	비 고
	당 초	변 경
신정증압장 모터펌프 제작구매 설치	2020. 4. 2. ~ 2020. 7. 1.	2020. 4. 2. ~ 2020.10.15.	*****	계약금액 변동없음

붙 임 : 합의서 1부. 끝.