문서번호	급수운영과-10280
결재일자	2020.6.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
조승수	이일로	06/23 이용구
협 조

설계변경 검토보고

(독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사)

2020. 06

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토보고

(독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사)

「독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감이 발생됨에 따라 설계변경을 시행하여 공사업무에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 계약기간 : 2020. 4. 17. ~ 2020. 06. 24.

○ 계 약 자 : ************

○ 계약금액 : *************

○ 공사개요 : D=300~600㎜, L=370m

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제39호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-7(계약금액의조정)”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화 및 상수도 공사의 특수성으로

신규공종, 자재 및 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 신규공종 : 「주철직관 부설공(야간) D300mm」외 21개 공종

- 신규사급자재 : 「부단수활정자관 D=300/300mm」 외 1개 자재

- 물량증가 : 「파쇄물기계상차(집하장) 유압식백호우 0.7m3」 외 20여개 공종

- 물량감소 : 「아스팔트 포장절단 200mm이하,4차선,작업시간제약」 외 41여개 공종

○ 주요 설계변경 사유

- “무단횡단 금지휀스 철거 및 재설치”           「급수운영과-8981(20.6.4.)」

- “부대공(안전시설물 설치)”                    「급수운영과-8981(20.6.4.)」

- “굴착폭 및 심도증가”                        「급수운영과-8981(20.6.4.)」

- “시험굴착 물량감소 및 인력비율 변경”         「급수운영과-8981(20.6.4.)」

- “기존관 철거공 누락”                        「급수운영과-8981(20.6.4.)」

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경                                       (단위 : 원)

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	********
도 급 비	***********	***********	**********	*******

○ 공사개요 변경

구 분	당 초	변 경	비고
공사개요	************** ********	************** ********	********* *********

○ 주요 신규공종 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
주철직관 부설공	300mm(야간)	m	*	*	*******
주철직관 부설공	600mm(야간)	m	*	***	**********
주철(이형관) 부설공	300mm(야간)	개소	*	**	*********
주철(이형관) 부설공	600mm(야간)	개소	*	**	*********
K.P 죠인트관 접합공	600mm(야간)	개소	*	**	*********
K.P 이탈방지압륜 접합	300mm(야간)	개소	*	**	*********
K.P 이탈방지압륜 접합	600mm(야간)	개소	*	**	*********
주철관 절단기(절단기 사용)	300mm(야간)	개소	*	*	*******
주철관 절단기(절단기 사용)	600mm(야간)	개소	*	***	**********
플랜지 접합공	300mm(야간)	개소	*	*	******
제수밸브 부설 및 접합공	300mm(야간)	개소	*	*	*******
제수밸브 부설 및 접합공(B.F.V)	600mm(야간)	개소	*	*	*******
절단면 녹막이페인트칠	300mm(야간),스프레이3회	개소	*	*	******
절단면 녹막이페이트칠	600mm(야간),스프레이3회	개소	*	**	*******
공기밸브 설치공	150mm(야간)	개소	*	*	*******
부단수활정자관천공분기점분기	300mm(야간)	개소	*	*	*******
주철직관 철거공	600mm(야간)	m	*	***	*********
원형밸브실 설치공(기초재활용플라스틱)	300mm(야간)	개소	*	*	*********
철개고정장치 설치공	원형받침용(야간), 재료비별도	개소	*	*	******
적벽돌 쌓기	1.0B, 3.6m이하(야간)	m2	*	*	*******
무단횡단금지휀스설치		경간	*	***	**********
무단횡단금지휀스철가		경간	*	***	*********

○ 주요 공종 물량 증 ․ 감 내역

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
파쇄물기계상차(집하장)	유압식백호 0.7m3	m3	**	***	*******
잔토상차(집하장)	굴삭기 0.7m3	m3	***	*****	*******
잔토처리(0.7상차비별도)	24DT, 집하장→매립지, 금천	m3	***	*****	**********
아스팔트 포장절단	200mm, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m	***	***	*******
인력터파기	견질토사, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	**	**	*********
인력터파기(협소, 지장물)	견질토사, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	**	***	*********
터파기(기계100%)보통	굴사기018, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	**	**	*********
터파기(기계100%)보통	굴사기06, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	***	*****	*********
기계다짐(보통)	램머80, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	***	**	***********
기계다짐(양호)	램머80, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	***	***	*********
A-파쇄물운반(06상차비별도)	15DT(현장→집하장3km),야간	m3	**	***	*********
잔토소운반(06터파기동시상차)	15DT(현장→집하장3km),야간	m3	***	*****	*********
주철직관 부설공	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	m	*	*	********
주철직관 부설공	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	m	***	*	************
주철(이형관) 부설공	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	***********
주철(이형관) 부설공	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	***********
K.P 죠인트관 접합공	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	************
K.P 이탈방지압륜 접합	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
K.P 이탈방지압륜 접합	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	************
주철관 절단기(절단기 사용)	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
주철관 절단기(절단기 사용)	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	***********
플랜지 접합공	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
제수밸브 부설 및 접합공	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
제수밸브 부설 및 접합공(B.F.V)	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
절단면 녹막이페인트칠	300mm(야간),스프레이3회	개소	*	*	********
절단면 녹막이페이트칠	600mm(야간),스프레이3회	개소	**	*	*********
공기밸브 설치공	150mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
원형밸브실 설치공(기초재활용플라스틱)	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	***********
철개고정장치 설치공	원형받침용(야간,4차선,작업시간제약), 재료비별도	개소	*	*	*********
적벽돌 쌓기	1.0B,3.6m이하 (야간,4차선,작업시간제약)	m2	**	*	***********
PE free 휀스 설치및철거	(야간)	m	***	***	*******
안전시설 설치및철거	간선(배관-손료포함, 야간)	일	**	**	*******
조명시설 설치및철거	손료포함, 야간	일	**	**	***********

○ 주요 자재 증 ․ 감 내역

공 종(자재)	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
부단수활정자관	300/200mm	개	*	*	*********
플랜지접합부속(고무링,볼트)	D300mm	조	*	*	********
플랜지접합부속(고무링,볼트)	D600mm	조	*	*	********
부단수활정자관	300/300mm	개	*	*	*********
철개고정장치	높이조절용(흄관용)	조	*	*	*******

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여

심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 검토보고(공단) 및 갑지(공단) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약조정검증 확인증 1부.

4. 산업안전보건비 검토서 1부.

5. 설계변경 사전심의 요청서 1부.

6. 합의서(승건산업(주)) 1부.  끝.