(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

낙산 성곽길 정비공사

공사개요

· 위    치 : 종로구 이화충신권 성곽마을 성곽길

· 규    모 : 한양도성 내측 순성길 주변 정비

-연장 863m, 면적 15,220㎡, 폭 15m내외

· 공사기간 : 2019.11.11.~2020.11. 9.

· 총공사비 : 2,324백반원

· 시공사 : 원택건설(주)외1개사

· 감독처 : 서울시설공단

· 설계사 : ㈜유신

실정보고 건명

공사현장 실정보고서(제3회) 승인요청(공사감독3처-4525, ‘20.6.16)

실정보고 사유

1) 하수관로 재질 변경(파형강관→흄관), 포방재질 변경(고강도 콘크리트→아스콘) 등 발주처 및 유지관리부서 요청사항 및 현장 실정(여건)사항 반영 설계변경 보고

서울시설공단

감독대행검토의견

1) 발주처 및 유지관리기관(종로구청) 요구사항 및 현장 실정을 고려한 변경사항으로 향후 설계변경 시행코자 함.

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	붙임 설계도서 참조
총공사비	2,323,512천원	2,355,544천원	증32,042천원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ● )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당사항 없음

발주처

검토의견

○ 발주처 및 유지관리기관(종로구청) 요구사항 및 현장 실정을 고려한 변경사항으로 적정하게 검토된바 아래 조건을 부여하여 승인통보하고자 함.

1) (운반 및 상차)

- 산근1,2,3,4,5,6의 덤프 왕복운반시간(t2) ‘운반도로와 평균주행속도’ 및 적재함덮개설치 및 해체시간(t5) 재검토

2) (장비조합)

- 일위대가 17호표 시험터파기 공종 중 관로터파기 및 되메우기및다짐 장비조합 재검토

비 고

붙임 : 실정보고서

결재

주무관

김소연

방재시설과장

김태중

방재시설부장

06/23

박홍봉

협조

주무관

김규희