- 중구민을 위한 도시 -
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행 {2020년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)}

우리 부서에서 시행 중인『2020년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)』에 대한 설계변경(1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2020. 3. 11. ∼ 2020. 12. 31.

다. 계약금액 : 398,990,000원

라. 계약상대자 : 한국재난안전기술(주)  대표자 이은경

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총공사비	462,098,000	738,000,000	증	275,902,000
도 급 비	398,990,000	611,990,000	증	213,000,000
관 급 비	36,108,000	58,964,220	증	22,856,220
이 전 비	27,000,000	67,045,780	증	40,045,780

바.  예산과목

부 서	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	비 고
도로시설과	도시기반 시설확충	도로유지 관리	도로시설물 유지보수공사	시설비 및 부대비	시설비	구비
			경사도로 개선 및 시설물 재정비 (시민참여)			보조금(시비)
			어르신 안전통행을 위한 계단정비 (시민참여)
서울시 하천관리과	재해 및 재난예방	재난예방 복구	재난예방 (재난관리기금 재난계정)	시설비 및 부대비	시설비	시비 재배정
청구동	생활환경 (청구동)	깨끗하고	깨끗한 생활환경 유지관리	시설비 및 부대비	시설비	구비

붙 임.  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경내역서  1부.

3. 일상감사 및 계약심사 결과 통보서 1부.

4. 제비율 검증확인서 1부.

5. 예산현황 1부.   끝.

주무관							최영기			도로관리팀장					이성하					도로시설과장					신대식				생활도시친화국장						06/23 정택근
협조자				주무관						한희주					계약팀장							엄병숙					재무과장							박종필
시행			도로시설과-6446									(	2020.6.23					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6113						/전송			02-3396-8839					/	sononow1@junggu.seoul.kr												/	대시민공개