문서번호	자연생태과-12294
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생태복원팀장	자연생태과장
강현희		홍순철	06/24 안수연
협조

개포로 녹지연결로 조성 관련 현안검토 및 조치계획 보고

『개포로 녹지연결로 조성공사』

현안검토 및 조치계획 보고 ∐

2020. 6

푸른도시국

(자연생태과)

『개포로 녹지연결로 조성공사』

현안검토 및 조치계획 보고∐

『개포로 녹지연결로 조성공사』관련 보행자 안전사고 예방 및 사면 안정화 등 현안사항에 대해 검토하고, 소요예산을 추가·배정하고자 함

Ⅰ		사 업 현 황

○ 위    치 : 강남구 개포동 175-3번지(달터근린공원 구룡역인근)

○ 규    모 : L35 × B20m

○ 총사업비 : 3,200백만원(‘20년 예산 2,018, 사고이월)

○ 사업기간 : 2018 ~ 2020. 5

※ 사업시행 기관 : 동부공원녹지사업소(시설과)

Ⅱ		현안사항 및 개선방안

○ 배수로 덮개가 미설치되어 이용객의 발이 빠지는 등 안전사고 발생우려가 있음

☞ 안전사고 예방 및 경관개선을 위해 배수로 목재덮게 설치

○ 공사진행과 관련하여 추가로 나지 등이 발생하여 사면 안정화(우기시 토사유출 등) 및 미관향상을 위해 관목 및 잔디 추가 식재

☞ 관목 및 잔디 추가식재

배수로 목재 덮개 설치필요	사면 안정화 필요

Ⅲ		조 치 계 획

○ 설계변경 및 공사시행(동부공원녹지사업소)

산 출 액	산 출 내 역	비고
25,000천원	- 배수로 덮개설치 : 150천원 × 68m ≒ 10,000천원 - 관목 식재 : 조팝나무 5천원 × 1,000주 = 5,000천원 - 잔디 식재 : 평떼 12천원 × 840㎡ ≒ 10,000천원

○ 소요예산 추가 배정(자연생태과)

- 총 지원예산 : 25,000천원(시설비)

※*****************************************************************

Ⅳ		행 정 사 항

○ 소요예산 배정

- 예산배정액 : 25,000천원

- 예산과목 : 푸른도시국 자연생태과, 생태계복원 및 보전과 야생동식물보호,  생태계복원사업, 단절된녹지축연결, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 관련공문 1부.  끝.