문서번호	기전과-6303
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
정영권		06/24 정판식
협조

『2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』제1차 기성준공 보고

2020. 6.

『2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

제1차 기성준공 보고

「2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)」와 관련 감리단으로부터 제출된 기전준공 요청사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 제1차 기성준공서류 제출 건

❍ ㈜건양엔지니어링 건양20(2020.6.24.)

2		공사개요

공 사 명 : 2020년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

공사내용 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부 시도

계약업체 : ㈜동방공업 대표 김병욱

계약금액 : 금82,613,450원(금팔천이백육십일만삼천사백오십원정)

계약기간 : 2020. 2. 24.(월) ~ 12. 28.(월)

감리업체 : ㈜건양엔지니어링

3		1회 기성준공 개요

준공대상 : 제1~2차 작업지시 완료 물량

구분	주요 작업내용	작업기간	비고
1차	르네상스호텔교차로 등 9건	2020.04.01.(수)~04.25.(토)
2차	올림픽공원 북2문교차로 등 6건	2020.05.21.(목)~06.10.(수)

❍ 작업지시 현황

❍ 기성검사

구분	소 속	직 급	성 명	비고
검사자	㈜건양엔지니어링	비상주감리원	최종복
입회자	㈜동방공업	현장대리인	김병욱
	동부도로사업소	주 무 관	정영권

❍ 주요기성 물량

연번	품명		규격		단위	수량	비고
1	규격 오각	신설	600*720 고휘도	반사지	매	6
2	규격 T형부착대	신설	1매용 백관		SET	2
3	규격 철주	신설	1매용 백관(L=3.0m)		SET	5
4	중형 삼각△	교체	1170 고휘도	반사지	매	1
5	중형 삼각△	교체	1350 고휘도	반사지	매	3
6	중형 원형	신설	Φ780 고휘도	반사지	매	10
7	중형 원형	교체	Φ780 고휘도	반사지	매	1
8	중형 원형	신설	Φ900 고휘도	반사지	매	6
9	중형 원형	교체	Φ900 고휘도	반사지	매	5
10	중형 오각	신설	780*936 고휘도	반사지	매	7
11	중형 사각	교체	780*390 고휘도	반사지	매	1
12	중형 사각	교체	715*780 고휘도	반사지	매	1
13	중형 사각	교체	780*780 고휘도	반사지	매	15
14	중형 사각	신설	900*300 고휘도	반사지	매	2
15	중형 사각	신설	900*450 고휘도	반사지	매	2
16	중형 사각	교체	900*450 고휘도	반사지	매	3
17	중형 사각	신설	780*1170 고휘도	반사지	매	2
18	중형 사각	교체	780*1170 고휘도	반사지	매	18
19	중형 T형부착대	신설	1매용 백관		SET	4
20	중형 T형부착대	신설	2매용 백관		SET	3
21	중형 T형부착대	철거	2-37h,38h		SET	1
22	중형 교차로대	신설	백관		SET	88
23	중형 철주	신설	1매용 백관(L=3.5m)		SET	6
24	중형 철주	신설	2매용 백관(L=4.5m)		SET	3
25	조립식테이퍼폴	철거	백관		SET	88
26	장애물표적표지	신설	400*400		매	2
27	장애물표적표지	교체	400*400		매	1
28	고소용표지	신설			매	6
29	고소용표지	이설			매	108
30	중형 삼각△	철거	1170		매	1
	합 계					401

4		기성 준공금액

(단위 : 원)

구 분		계약금액	전회기성	금회기성	누계금액	잔여금액	비고
총공사비		82,613,450	-	43,494,630	43,494,630	39,118,820	변경없음
도급비	공급가액	75,103,137	-	39,540,573	39,540,573	35,562,564
	부가가치세	7,510,313	-	3,954,057	3,954,057	3,556,256
	소 계	82,613,450	-	43,494,630	43,494,630	39,118,820

5		보고자 의견

감리사로부터 접수된 기성준공 결과 보고서를 검토한 결과

적정하다고 판단되어 기성 준공처리 하고하 함.

붙 임 : 1. 기성준공검사 결과보고 공문 1부.

2. 기성준공 내역서 1부.  끝.