문서번호	물순환정책과-11195
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	통합물관리팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
김우환	조장환	임춘근		06/24 이정화
협 조	하천관리과장		한유석
	치수설비팀장		이문주

흑석유수지 CSOs 저류조 설치 계획

2020. 6.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

흑석유수지 CSOs 저류조 설치 계획

합류식 하수관로 월류수(CSOs)의 고농도 오염물질이 하천으로 직접 유입되어 발생하는 수질오염을 방지하고자 흑석동 빗물펌프장 신설(이전)과 연계하여 CSOs 저류조를 설치하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○ 서울특별시 비점오염 및 월류수 저감방안 연구(2011.3.)

- 유수지 지하에 CSOs 저류조 설치로 비점오염원 관리 필요

****************************************************

********************************************************

Ⅱ		추진경위

○ CSOs 저류조 설치사업 타당성조사/기본계획 용역 완료(‘14. 7월)

- 설치 완료(양평1유수지), 설계 완료(응봉유수지), 설계중(휘경유수지)

○ 행정2부시장 현안업무보고*****************

**************************************************************************

	********************
************************ ***************************** *************************************** ******************************** ******************************************** ****************************** ****************************** *******************************************************

Ⅲ		CSOs 저류조 설치 계획

▢ 설치 개요

○ 시설용량 : 약 24,000㎥(비점오염 및 월류수 저감방안 연구 참고,2011.3.)

○ 설치방안 : 흑석동 빗물펌프장과 연계하여 CSOs 저류조 설치

○ 사 업 비 : 20,000백만원(국고보조금 50% 포함)

※ 시설용량 및 사업비 등 개요는 기본계획 수립 및 기본설계 중 변경 가능

▢ 현황 및 문제점

○ 흑석CSOs는 2031년 이후 추진예정이나, 빗물펌프장 설치완료시 CSOs 저류조 설치가 불가하여 동시 추진 필요

********************************************CSOs저류조 계획 반영을 위해 연내 기본설계 완료 필요하나,

****************************************

******************************************

****************************************************************************

▢ 추진방안

*********************************************************************

- CSOs 저류조는 빗물펌프장 하부에 설치되는 시설로 빗물펌프장 기본설계와 연계 검토하는 것이 합리적인 것으로 판단

******************************************************

**************************************************************************************

- 주요 과업내용

‣ 지역 현황분석 및 기초자료 작성(빗물펌프장 설계와 중복사항 제외)

‣ 흑석 CSOs 저류조 설치 기본계획 수립 및 기본설계

‣ 비점오염저감 국고보조사업 신청 검토 및 보완, 기타 업무지원

***********************************

****************

**************************************************************

▢ 향후 계획

○ ‘20.07.	: 용역 과업내용변경 검토 및 의뢰(물순환정책과→하천관리과)

○ ‘20.12.	: 흑석 CSOs 기본설계 완료

************************************************

*********************************************

*******************************************

붙임 : 1. 위치도 및 현장사진 1부.

******************************************