문서번호	급수운영과-10307
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
조승수	代류태현	06/24 이용구
협 조

설계변경 심의 결과보고

(독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사)

2020. 06.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 결과보고

(독산동 범안로 장기시용 송배수관 정비공사)

「독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감이 발생됨에 따라 설계변경 심의를 마치고 결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 계약기간 : 2020. 4. 17. ~ 2020. 06. 24.

○ 계 약 자 : *************

○ 계약금액 : *************

○ 공사개요 : D=300~600㎜, L=370m

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시 : 2020. 06. 24.(수) 10:00

○ 장    소 : 남부수도사업소 급수운영과(3층)

○ 심의내용 : 신규공종 및 계약물량 증·감사항 심의

○ 참석위원 : 위원장 급수운영과장 외 심의위원 3명(시설관리과)

간사 및 입회자 1명

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화 및 상수도 공사의 특수성으로

신규공종, 자재 및 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 신규공종 : 「주철관직관 부설공(야간) D300mm」외 21개 공종

- 신규사급자재 : 「부단수활정자관 D=300/300mm」 외 1개 자재

- 물량증가 : 「파쇄물기계상차(집하장) 유압식 0.7m3」 외 20여개 공종

- 물량감소 : 「아스팔트 포장절단 200mm이하,4차선,작업시간제약」  외 41여개 공종

○ 주요 설계변경 사유

- “무단횡단 금지휀스 철거 및 재설치”           「급수운영과-8981(20.6.4.)」

- “부대공(안전시설물 설치)”                    「급수운영과-8981(20.6.4.)」

- “굴착폭 및 심도증가”                        「급수운영과-8981(20.6.4.)」

- “시험굴착 물량감소 및 인력비율 변경”         「급수운영과-8981(20.6.4.)」

- “기존관 철거공 누락”                        「급수운영과-8981(20.6.4.)」

□ 설계변경 심의현황

○ 계약금액 변경 – 적정                                 (단위 : 원)

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	********
도 급 비	***********	***********	**********	*******

○ 공사개요 변경 - 적정

구 분	당 초	변 경	비고
공사개요	D=600㎜, L=370m 각종변실 5개소	D=600㎜, L=352m 각종변실 4개소	부설: 감 18m 변실: 감 1개소

○ 주요 신규공종 내역 - 적정

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
주철직관 부설공	300mm(야간)	m	-	*	*******
주철직관 부설공	600mm(야간)	m	-	***	**********
주철(이형관) 부설공	300mm(야간)	개소	-	**	*********
주철(이형관) 부설공	600mm(야간)	개소	-	**	*********
K.P 죠인트관 접합공	600mm(야간)	개소	-	**	*********
K.P 이탈방지압륜 접합	300mm(야간)	개소	-	**	*********
K.P 이탈방지압륜 접합	600mm(야간)	개소	-	**	*********
주철관 절단기(절단기 사용)	300mm(야간)	개소	-	*	*******
주철관 절단기(절단기 사용)	600mm(야간)	개소	-	***	**********
플랜지 접합공	300mm(야간)	개소	-	*	******
제수밸브 부설 및 접합공	300mm(야간)	개소	-	*	*******
제수밸브 부설 및 접합공(B.F.V)	600mm(야간)	개소	-	*	*******
절단면 녹막이페인트칠	300mm(야간),스프레이3회	개소	-	*	******
절단면 녹막이페이트칠	600mm(야간),스프레이3회	개소	-	**	*******
공기밸브 설치공	150mm(야간)	개소	-	*	*******
부단수활정자관천공분기점분기	300mm(야간)	개소	-	*	*******
주철직관 철거공	600mm(야간)	m	-	***	*********
원형밸브실 설치공(기초재활용플라스틱)	300mm(야간)	개소	-	*	*********
철개고정장치 설치공	원형받침용(야간), 재료비별도	개소	-	*	******
적벽돌 쌓기	1.0B, 3.6m이하(야간)	m2	-	*	*******
무단횡단금지휀스설치		경간	-	***	**********
무단횡단금지휀스철가		경간	-	***	*********

○ 주요 공종 물량 증 ․ 감 내역 - 적정

공 종	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
파쇄물기계상차(집하장)	유압식백호 0.7m3	m3	**	***	*******
잔토상차(집하장)	굴삭기 0.7m3	m3	***	*****	*******
잔토처리(0.7상차비별도)	24DT, 집하장→매립지, 금천	m3	***	*****	**********
아스팔트 포장절단	200mm, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m	***	***	*******
인력터파기	견질토사, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	**	**	*********
인력터파기(협소, 지장물)	견질토사, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	**	***	*********
터파기(기계100%)보통	굴사기018, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	**	**	*********
터파기(기계100%)보통	굴사기06, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	***	*****	*********
기계다짐(보통)	램머80, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	***	**	***********
기계다짐(양호)	램머80, 야간, 4차선, 작업시간 제약	m3	***	***	*********
A-파쇄물운반(06상차비별도)	15DT(현장→집하장3km),야간	m3	**	***	*********
잔토소운반(06터파기동시상차)	15DT(현장→집하장3km),야간	m3	***	*****	*********
주철직관 부설공	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	m	*	*	********
주철직관 부설공	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	m	***	*	************
주철(이형관) 부설공	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	***********
주철(이형관) 부설공	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	***********
K.P 죠인트관 접합공	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	************
K.P 이탈방지압륜 접합	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
K.P 이탈방지압륜 접합	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	************
주철관 절단기(절단기 사용)	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
주철관 절단기(절단기 사용)	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	**	*	***********
플랜지 접합공	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
제수밸브 부설 및 접합공	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
제수밸브 부설 및 접합공(B.F.V)	600mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
절단면 녹막이페인트칠	300mm(야간),스프레이3회	개소	*	*	********
절단면 녹막이페이트칠	600mm(야간),스프레이3회	개소	**	*	*********
공기밸브 설치공	150mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	*********
원형밸브실 설치공(기초재활용플라스틱)	300mm(야간,4차선,작업시간제약)	개소	*	*	***********
철개고정장치 설치공	원형받침용(야간,4차선,작업시간제약), 재료비별도	개소	*	*	*********
적벽돌 쌓기	1.0B,3.6m이하 (야간,4차선,작업시간제약)	m2	**	*	***********
PE free 휀스 설치및철거	(야간)	m	***	***	*******
안전시설 설치및철거	간선(배관-손료포함, 야간)	일	**	**	*******
조명시설 설치및철거	손료포함, 야간	일	**	**	***********

○ 주요 자재 증 ․ 감 내역 - 적정

공 종(자재)	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
부단수활정자관	300/200mm	개	*	*	*********
플랜지접합부속(고무링,볼트)	D300mm	조	*	*	********
플랜지접합부속(고무링,볼트)	D600mm	조	*	*	********
부단수활정자관	300/300mm	개	*	*	*********
철개고정장치	높이조절용(흄관용)	조	*	*	*******

□ 설계변경 심의검토 내용

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 신규공종 및 계약변동물량 계약단가 적정 여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여

심의한 바, 심의 결과 적정함에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 심의의결서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.