문서번호	기전설비과-6015
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기전설비과장	생산부장
이래운	조성태	06/24 서대훈
협 조
	시설과장		송병욱

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함계 합니다!”

「낙산배수지 건설공사」

기계분야 실정보고 검토결과

2020. 6.

상수도사업본부

[생산부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「낙산배수지 건설공사」

기계분야 실정보고 검토결과

아리수 안정적 공급을 위한 낙산배수지 건설공사 추진 중 기계공사와 관련 감리단에서 제출한 실정보고 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 추진배경

◯ 근    거 : 2030 서울 수도정비기본계획(2013.12.)

◯ 목    적 : 배수지 적정 체류시간 확보를 통한 무단수 급수 체계를 구축하여 아리수의 안정적 공급 및 시민 불편 해소

□ 공사개요

◯ 사업규모 : 배수지 확충 2,300㎥(기존 3,300㎥ ⇒ 5,600㎥)

송배수관부설 D400㎜, 연장 596.70m

◯ 공사규모 : 배수지 확충에 따른 기계배관 설치공사

◯ 공사기간 : ’17. 12. 13.~’20. 6. 29.(총차)/’20. 1. 1.~’20. 6. 29.(4차)

◯ 도 급 비 : 2,368백만원(총차)/284백만원(4차분)

◯ 시 공 사 : ㈜엔시종합건설(토목), ㈜교화엔텍(기계)

Ⅱ		실정보고 주요내용

◯ 검토배경

- 낙산배수지 건설공사 예비준공검사 시 유량계실 등에 배수펌프 설치에 관한 의견이 있어 그에 따른 배수펌프 설치의 적정성 검토.

※ 관련문서 : 예비준공검사 시행 결과 보고(시설과-1311, 2020. 5. 6.)

- 낙산배수지 통수전 시설물 합동 점검결과(‘20. 5. 12.)  가압장 내 신설배관의 수충격 방지를 위한 보호공 설치 요청에 따른 적정성 검토.

※ 관련문서 : 낙산배수지 시설물 합동점검에 따른 의견 제출           (중부수도사업소 시설관리과-11070, 2020. 5. 18.)

◯ 실정보고 주요내용

- 유입제수밸브실 및 유량계실 배수펌프 설치

․설치수량 : 총 2대

․배수펌프 규격: 160ℓ/min×4mH×0.35kW

- 배수펌프 드레인 배관 설치 : STS304, 25A× 6.6m

- 낙산가압장 내 신설배관 보호공 설치(2개소)

․1.5m×1.0m×1.1m(H) - 1개소, 0.8m×1.0m×1.1m(H) - 1개소

- 기계 배관공사 실물량 정산(당초 대비 도급비 9,991천원 감)

구 분	당초	변경	증・감	비고
배관 자재비 및 설치비 등	39,494,339	28,502,453	감 9,991,886

◯ 3차분 공사비(기계공사) 증·감 현황(당초 대비 도급비 13,241천원 감)                                                            (단위 : 원)

구 분		당초	변경	증・감	비고
기계 공사	1. 직접비	39,494,339	29,502,453	감 9,991,886
	2. 간접비	20,752,661	17,503,547	감 3,249,114
	3. 도급비	60,247,000	47,006,000	감 13,241,000

◯ 건설사업관리자 검토의견

- 상기사항은 당초 설계에 미반영된 사항으로 예비준공 검사 시 지적사항 및 중부 수도사업소 요청사항으로 준공 후 시설물 유지관리에 필요하다고 판단되며 이로 인한 공사비 증․감내용은 향후 설계변경 시 반영함이 적정함.

Ⅲ		실정보고 검토결과

◯ 감리단 검토의견 적정 여부 : 적정

- 밸브실 및 유량계실의 침수 대비 배수펌프와 관련배관 설치는 시설물의 유지관리를 위해 필요한 사항이며,

- 낙산가압장 내 신설배관의 수충격 방지를 위한 관 보호공 설치는 시설물의 안정성 확보를 위해 필요한 사항임.

Ⅳ		향후계획

◯ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속조치 이행.

붙임  1. 감리단 실정보고 1부.

2. 내역서 1부.

3. 관련도면 1부.

4. 예비 준공검사 시행 결과 보고 1부.

5. 낙산배수지 시설물 합동점검에 따른 의견 제출 1부.  끝.