문서번호	설비부-9039
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	★설비부장
박근형		代유영선	06/24 임정규
협조

『이화충신권 낙산성곽길 정비사업 통신공사』

관급자재(방송수신기) 납품기한 연기 검토보고

2020. 06.

도시기반시설본부

(설비부)

『이화충신권 낙산성곽길 정비사업 통신공사』

관급자재(방송수신기) 납품기한 연기 검토보고

「이화충신권 낙산성곽길 정비사업 통신공사」관급자재(방송수신기) 납품기한 연기 요청이 있어 검토보고 드림

1		공사개요

□  공 사 명 : 이화충신권 낙산성곽길 정비사업 통신공사

□  규    모 : 낙산성곽길 일대 CCTV 설치 및 정비

□  공사기간 : `19.11.15~`20.11.13

□  도 급 비 : 116,677천원

□  감 리 사 : ㈜평화이앤씨

□  시 공 사 : 주식회사 신석

2		관련근거

□  방송수신기 납품기한 연기요청(건설사업관리단.‘20.06.23.)

3		납품기한 연기내용

□  변경내용

품 명	계 약 자	계약금액	납품기한
			당 초	변 경
방송수신기	************	**********	`20.06.24	`20.11.30

□  연기사유 : 선행공종(토목) 공정 일정에 따른 자재 납품시기 미도래

□  귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부 사유로 지체상금 미부과

4		보고자 조치의견

□ 현장여건을 감안한 건설사업관리자 검토의견이 적정하다고 판단되므로 관급자재 납품시기를 조정하여 적기에 수급 가능하도록 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 감리사 공문 1부.  끝.