문서번호	시설과-4881
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장
김용주	06/24 代이춘한
협 조
	운영과장		김명준
	동물기획과장		김보숙
	주무관		배진수

「해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사」 예비 준공검사 결과 보고

2020. 6.

서울대공원

(시 설 과)

「해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사」

예비 준공검사 시행 계획

「해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사」에 대한 예비 준공검사를 시행하고 결과를 보고함

☞ 관련근거 : 건설공사 예비준공검사 시행방법 개선 안내(기술심사담당관실-10127(‘18.6.29.)

※ 예비준공검사 대상에 포함되지 않는 중·소규모 건설공사

⇒ 공사 성질·규모 등을 고려하여 기관장(부서장) 판단 하에 예비준공검사실시

1		공사개요

□ 공 사 명 : 해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사

□ 공사기간 : 2019. 10. 31. ∼ 2020. 6. 26.

□ 계약금액 : ***************

□ 계 약 자 : **************

□ 현 공 정 : 전시수조 연결통로, 2층 공무직 휴게실 소방시설 공사중(공정율 98%)

2		예비 준공검사 시행

□ 검사일시 : 2020. 6. 18.(목) 14:00 ~

□ 예비준공 검사자

분 야	검 사 자		비 고
	부 서 명	성 명
건 축 분 야	시 설 과	배진수	건축시설
시설운영분야	운 영 과	공기현, 남궁영화	수유실, 화장실, 공무직휴게실
전시시설분야	동물기획과	김능희	전시시설 운영에 관한 사항

3		예비 준공검사 결과

□ 운영과

◯ 환경팀

점검결과	조치의견	비 고
1층 장애자 화장실에 청소용 수도꼭지 필요	보완예정

◯ 고객지원팀

점검결과	조치의견	비 고
아기쉼터 모유수유실 내부 귤열 10곳	보완예정
석고보드 천장 구멍 2곳	보완예정
가족수유실 벽 앙카볼트 2개 제거필요	보완예정
아기쉼터 입구 문 틈새 방풍보완 2곳	보완예정
아기쉼터 내부 스위치 옆 홈발생	보완예정
아기쉼터 입구벽면, 간판 주변 칠 보완 필요	보완예정
아기기저귀 교환대 스텐드봉 미설치	보완예정
아기쉼터 입구 보도블록 침하	보완예정
아기쉼터 내 수돗물 녹물현상 있음	배관내 장기체류로 인한 일시적인 현상임

□ 시설과 건축팀

점검결과	조치의견	비 고
관람석 2층 출입구 철판지붕 모서리 면처리 필요	보완예정
해양관 앞 광장 보도블록 일부 침하	보완예정
수유실 앞 석재뿜칠 일부 보완 필요	보완예정
장애자 화장실 앞 배수 홈통 하부까지 연결 필요	보완예정

□ 동물기획과 동물원기획팀

점검결과	조치의견	비 고
공연수조 안전울타리 부분 위험성 있음	발빠짐 및 돌출부분 보완예정
공연수조 H빔 모서리 둥글게 면처리 필요	보완예정
공연수조 바닥 배수 구멍 덮게 돌출로 위험	제거예정
2층 관람석 출입문 부분 모서리 날카로움	보완예정
해저터널 출입구 누수현상 발생	방수보완 예정
2층 관람석 출입문 부분 도장 벗겨짐	보완예정
해저터널 천장누수로 영상기기 고장	방수보완 예정
1층 전시실 영상실 천장누수로 욕조부분 물고임	관리동 옥상 방수보완 예정

4		예비 준공검사 결과에 대한 조치

□ 예비준공 검사 결과에 대하여 보완공사를 시행하고 함

첨부 : 1. 환경팀 예비준공검사 결과 점검표 1부.

2. 고객지원팀 예비준공검사 결과 점검표 1부.

3. 건축팀 예비준공검사 결과 점검표 1부.

4. 동물원기획팀 예비준공검사 결과 점검표 1부.  끝.