코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약(준공기한 연기) 및 계약내용(대표자) 변경의뢰

1. 계약번호 2019100FDDE-01와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중에 있는「오현적환장 관련 갈등영향분석 및 조정용역」과 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기 및 대표자 변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 오현적환장 관련 갈등영향분석 및 조정용역

- 용역기간 : 2019.10.25.~ 2020.6.24.

- 용 역 비 : 금39,380,000원(금삼천구백삼십팔만원)

- 계약업체 : (사)한국갈등학회 대표 김학린

나. 준공기한 연기

- 당  초 : 2019. 10. 25.~ 2020. 6. 24.

- 변  경 : 2019. 10. 25.~ 2020. 7. 31.

- 변경사유 : 과업기간 중 코로나-19 사태에 따른 이해당사자 주민대표와 강북구청간 대화협의체 개최지연

- 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 : 미부과

다. 대표자 변경

구 분	당초	변경
대표자	***	***

붙임 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 기한연장 합의각서 1부.

4. 대표자변경요청 공문 1부.  끝

	갈등조정담당관
★주무관	노대호		갈등조정팀장	윤병수		갈등조정담당관	06/19 홍수정
협조자
시행	갈등조정담당관-5382	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 서소문로 124 (서소문동) 서소문2청사 10층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-6353	/전송	02-2133-0757	/		/	부분공개(5)