문서번호	건축부-10479
결재일자	2020.6.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
서경식		차무흥	06/22 임인구
협조
	주무관		김민희

『스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역』

계약변경(총차,4차) 검토 보고

2020. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역』

계약변경(총차,4차) 검토 보고

「스페이스 살림 조성공사」추가 및 변경 공사 요청사항 반영을 위해 증가된 공사기간 동안의 현장 관리·감독에 필요한 감리원(건축 및 설비분야) 배치기간 연장에 대한 건설사업관리단의 실정보고가 제출되어 검토보고 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 스페이스 살림 조성공사 건설사업관리용역

○ 용역업체 : ㈜희림종합건축사사무소 외 1개사

○ 용역기간 : 2017.9.25. ~ 2019.07.24.

○ 계약금액 : 금2,554,201,000원(총차)

□ 용역 계약현황

구 분	계약금액(원)	용역기간	비 고
총 차	*************	*******************	***********
1 차	***********	*******************	*****
2 차	***********	*******************	〃
3 차	***********	*******************	〃
4 차	***********	*******************	***********

□ 실정보고 내용

○ 보고 현황

-「건설사업관리용역 계약변경 요청(총차, 4차)」

HAP 20-0618-1276호(2020. 6. 18.)

○ 관련 근거

- 용역계약일반조건 제17조(계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 변경 사유

- **************************************************************************************

○ 예산 관련

- ***************************

*****************************************************

- 예산 과목: 성평등 및 여성복지증진, 여성경제력 강화, 스페이스 살림 건립 추진, 감리비

□ 계약변경 내용

○ 공사 계약기간 변경내용

- 건 축 부

· 건축, 토목, 조경

`17.12.26.~`20.06.25. ⇨ `17.12.26.~`20.09.25. [증 92일]

- 설 비 부

· 기    계 : `18.08.21.~`20.06.30. ⇨ `18.08.21.~`20.09.29. [증 91일]

· 전    기 : `18.09.10.~`20.06.30. ⇨ `18.09.10.~`20.09.30. [증 92일]

· 정보통신 : `18.09.10.~`20.06.30. ⇨ `18.09.10.~`20.09.29. [증 91일]

○ 건설사업관리용역 변경 세부 내용

- 용역 기간 변경

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총차	기간	*********************	*********************	*****
	금액	**********	*********	*********
4차	기간	*********************	*********************	*****
	금액	********	*******	*********

- 건설사업관리기술자(상주기술자) 배치 재조정

구 분	당 초	변 경	투입일 증감
책임건설사업관리기술자	*********************	*********************	*****
상주기술자 (건축1)	*********************	*********************	******
상주기술자 (기계2)	*********************	*********************	*****
상주기술자 (전기)	*********************	*********************	*****
상주기술자 (정보통신)	*********************	*********************	*****

□ 책임건설사업관리기술자 의견

○ ******************************************************************************************************

□ 처리의견

○ *********************************************************************************************************************************.

붙 임 : 1) 공사계약변경 검토보고서 4부

2) 건설사업관리용역 계약변경 요청서 1부.  끝.