“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	수도권매립지관리공사 사장
(경유)
제목	토사 반입 기간 연장 요청 (2019년 서초구 관내 상수도,소화전 시설물 설치 및 보수공사)

1. 서울시 상수도 행정 업무에 협조하여 주시는 귀 기관에 감사 드립니다.

2. 시설관리과-26344(2019.12.17.)호와 관련으로 우리 사업소에서 상수도공사 시행 중 발생되는 토사를 수도권 매립지로 반입하고자 기간을 연장 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 토사반입개요

연번	공 사 명	회 사 명	반 입 기 간		반입예정물량	비고
			당 초	변경 (연장)
1	2019년 서초구 관내 상수도,소화전 시설물 설치 및 보수공사	도문건설(주)	2019.07.16.~ 2020.6.30	2019.07.16.~ 2020.7.30	830㎥

첨 부 : 1. 사용인감 확인원 1부.

2. 확약서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김재영		시설관리과장	06/23 정재현
협조자
시행	시설관리과-10860	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	대시민공개