문서번호	역사도심재생과-6455
결재일자	2020.6.23.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		도심계획팀장	역사도심재생과장
조장희		배성호	06/23 조남준
협조

- 덕수궁길 주변 보행환경개선사업 기본 및 실시설계 용역 -
준공기한 연기 검토 보고

2020. 6.

도시재생실

역사도심재생과

- 덕수궁길 주변 보행환경개선사업 기본 및 실시설계 용역 -
준공기한 연기 검토 보고

▢ 용역개요

○ 용 역 명 : 덕수궁길 주변 보행환경개선사업 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : `19.11.11. ~ `20.7.7.

○ 계약업체 : (주)다산이엔지

************************

○ 용역개요

- 위 치 : 중구 덕수궁길(고종의길)~새문안로2길(덕수공원)

- 규 모 : 덕수궁길 보행환경 개선(1단계), 개방형공지 조성 등

○ 추진경위

- ‘19.11.11.     용역 착수

- ‘20.  2.~ 5.    사업추진협의회 개최(총 4회)

- ‘20.  5.~ 6.    문화재현상변경 심의(정동1928 아트센터 앞마당 조성 관련)

▢ 변경내용 검토보고

○ 준공기한 : (당초) `19.11.11.~`20.  7.  7.

(변경) `19.11.11.~`20.10.31.

****************

********************

*********************************************************************

▢ 향후계획

○ 준공기한 연기 의뢰 : 재무과

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.