문서번호	급수설비과-5729
결재일자	2020.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
이재학		유동수	06/23 이규상
협 조

소규모 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 건설사업관리용역 주간 실적 보고

2020. 6. 23

상수도사업본부

(급수설비과)

『 소규모 상수도공사(급수,누수복구,시설물)  건설사업관리용역 주간 실적 보고

소규모 상수도공사(급수,·누수복구·시설물)의 건설사업관리용역에 대해 용역사 로부터 제출된 주간실적을 검토하고 결과 보고 드림.

Ⅰ. 현  황

용 역 명	강서·남부·강남지역 소규모 상수도공사의 건설사업관리용역	동부·북부·강동지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역	중부·서부지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역
용역개요	급수공사 : 15,676건 누수복구 : 15,090건 시 설 물 : 4,742건	급수공사: 13,032건 누수복구: 14,568건 시 설 물: 6,420건	급수공사: 10,526건 누수복구: 12,706건 시 설 물: 4,038건
용역기간	’19.6.22~’21.6.21	’19.6.22 ~ ’21.6.21	’19.6.22 ~ ’21.6.21
총 계약금액 (2차수 금액)	5,165,859천원 (2,506,072천원)	4,906,503천원 (2,379,921천원)	3,919,833천원 (1,914,412천원)
용 역 사	㈜건양ENG 대표이사 김종문 ㈜한국종합기술 대표이사 이상민	㈜이준ENG 대표이사 이승헌 ㈜ 천일 대표이사 김창욱	㈜대한콘설탄트 대표이사 이영민 ㈜한국종합ENG 대표이사 한명웅
과업내용	급수공사, 누수복구공사, 시설물공사, 간선배관공사에 대한 시공감리

(단위: 명)

인력배치 현황		계	강서	남부	강남	동부	북부	강동	중부	서부
투입 인원	계	77	28			27			22
	책임기술인	3	1			1			1
	기술지원기술인	3	1			1			1
	상주기술인	71	9	11	6	10	9	6	11	9
담당부서			급수설비과			누수방지과			시설관리과

Ⅱ. 금주 주요실적 보고

≪서울시 관내 총괄≫

□ 추진기간: 2020. 6. 8. ~ 6. 14.

□ 추진실적

구 분		건설사업관리기술인			입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		감리대상 건수(계)	현장감독 (건)	사후확인 (건)
금 주		298	294	4	98.7	1,337.3	2
누계	‘20.1.1. 이후	5,225	5,175	50	99.0	17,906.3	19
	‘19.6.22. 이후	15,234	15,072	162	98.9	58,481.1	57

- 세부내용

구 분	지시 (시공건수)	건설사업관리(건수)						상수도관부설(m)			시정지시(건수)
		계	신설	구경 확대	폐전	개량	기타	계	50mm 이하	80mm 이상	계	서면	구두
금주	298	298	53	70	27	125	23	1,337.3	705.5	631.8	2	0	2
‘20.1.1. 이후	5,225	5,225	875	1,251	642	2,151	306	17,906.3	10,965.7	6,940.6	19	0	19
‘19.6.22. 이후	15,234	15,234	2,383	3,425	1,332	7,145	949	58,481.1	32,643.4	25,837.7	57	1	56

※ 불용관 정비현황

구 분	횡방향불용관(기존분기점)폐쇄						진행중	종방향 불용관			개량대상 배수관
	계	맹새들	새들 잠금	재사용	맞이음	기타		발견	폐쇄	진행중
금주	112	1	86	10	10	5	0	0	0	0	0
‘20.1.1. 이후	2,207	16	1,600	221	275	95	0	0	0	0	2
‘19.6.22. 이후	6,031	46	4,202	582	687	514	0	2	2	0	5

○ 포장복구공사(건설사업관리기술인)

구 분	계			급수공사업체 복구			포장복구업체 복구
	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)
금 주	231	201	87.0	43	43	100.0	188	158	84.0
누 계	3,335	3,106	93.1	715	715	100.0	2,620	2,391	91.3

- 세부현황

구분	총괄							급수업체 복구					포장복구업체 복구
	지시 건수	완료			미복구			지시 건수	완료			미 착공	지시 건수	완료			미복구
		계	현장 감독	사후	계	미 착공	표층		계	현장 감독	사후			계	현장 감독	사후	계	미 착공	표층
전주	3,104	3,104	2,905	199	0	0	0	672	672	672	0	0	2,432	2,432	2,233	199	0	0	0
금주	231	231	201	30	0	0	0	43	43	43	0	0	188	188	158	30	0	0	0
누계	3,335	3,335	3,106	229	0	0	0	715	715	715	0	0	2,620	2,620	2,391	229	0	0	0

○ 건설사업관리기술인 상호 업무지원

구 분	계				사업소 내				사업소 간
	계	급수	누수 복구	시설물	계	급수	누수 복구	시설물	계	급수	누수 복구	시설물
금주(회)	4	1	0	3	4	1	0	3	0	0	0	0
누계(회)	79	50	6	23	79	50	6	23	0	0	0	0

○ 누수복구 공사

구 분	시행 건수	건설사업관리 건수
		입회건수	비율(%)	이첩(노후관)	1일 1인 건수
누계	7,772	7,309	94.0	54	2.7
금주 실적	405	387	95.6	6	3.1
전주까지 계	7,367	6,922	94.0	48	2.8

○ 시설물 공사

구 분	건설사업관리 건수			현장입회율 (%)	업무지원 (건)	시정조치 (건)
	계	현장입회(건)	사후확인(건)
누 계	2,965	2,949	16	99.5	110	26
금주 실적	219	219	0	100.0	0	4
전주까지 계	2,746	2,730	16	99.4	110	22

붙임 : 주간실적 보고 요약(용역사→본부) 1부(별도). 끝.