문서번호	기반시설과-2107
결재일자	2020.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
김일문	라철흠	06/23 전영주

설계변경 보고

(성수대교북단외2개소승강기설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6. .

한강사업본부 기반시설과

설계변경보고

‘성수대교북단외2개소승강기설치공사’의 1차 및 2차공사에 대하여

설계변경 시행하여 원활한 공사추진을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 성수대교북단외2개소승강기설치공사

○ 위    치 : 성수대교북단,성수대교남단, 동작대교북단

○ 도 급 비 : 3,244,489(1차 1,095,586천원, 2차 2,148,902천원)

○ 도 급 사 : 명남종합건설(주)외1개사

○ 공사기간 : 2019.11.4.~ 2020.12.20

□ 설계변경 내역

(단위:천원)

구분	총 차			1차			2차			비고
	당초	변경	증․감	당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
도급비	3,244,489	3,279,320	증34,831	1,095,586	1,095,586	0	2,148,902	2,183,733	증34,831
공사 기간	‘19.11.4.~ ‘20.12.20	“변경없음”		‘19.11.4~ ’20.6.30	“변경없음”		‘20.2.5~ ‘20.12.20	“변경없음”

□ 변경내용 및 금액

구 분	수 량 변 경				금 액 변 경			비 고
	단위				당초	변경	증·감
		당초	변경	증·감
1)성수북단 공사중 자전거 도로 및 보도 우회공사등	1식	1식	1식	1식	-	17,638	+17,638
2)동작북단 경사로설치등	m	0	36	+36	24,948	47,948	+22,551
3)화강석 판석설치 설계오류내역 정정	㎡	299	0	-299	15,955	-	-15,955
4)폐기물 처리비 변경 (별도발주)	톤	47	194	+147	1,279	-	-1,279
5)보험료등 제경비 정산	1식				-	11,876	+11,876
도 급 비					3,244,489	3,279,320	+34,831

□ 실정보고 반영 사항

구 분	실 정 보 고 내용	비고
1)성수북단 공사중 자전거 도로 및 보행로 우회공사	성수대교북단 교량하부 현장의 작업공간 협소로 대형장비 진출입시 이용시민 안전사고의 위험에 따라 기존 녹지 및 배수로이용 하여 자전거도로 및 보행로 우회도로설치로 작업공간 확보 및 이용자 안전도모	기반시설과 -271(20.2.3)
2)동작북단 경사로설치등	- 승강기설치구간에 설치된 기존 경사로의 기울기가 설치기준에 부적합하여 경사로 2개소 개선 설계시 토공량 설계수량 오류에 따른 변경적용 세굴방지 보호공 기존 포장면적등 고려하여에 변경시공	기반시설과 –1569(‘20.5.12)
3)화강석 판석설치 설계오류내역 정정	설계수량 화강석 판석수량 중복적용에 따른 감 정정 반영	설계서검토시 발견
4)폐기물 처리비 변경 (별도발주)	당초 폐기물 수량이 100톤 미만으로 내역서 반영되었으나 현장여건에 따른 발생량증가로 100톤 이상으로 관련법령에 따라 별도발주 시행으로 인한 정정반영	기반시설과 –1666(20.5.18)

□ 설계변경 사유

○ 공사추진중 현장여건에 따른 실정보고분 반영 및 차수별 내역조정

□ 조치사항

○ 공사의 원활한 추진을 위하여 실정보고 사항에 대하여 물량반영  변경하고 차수별 내역조정하여 설계변경 실시코자 함.

□ 예산과목

○ 한강공원관리및운영,한강공원시설관리및개선,한강공원 접근시설유지관리(한강교량 한강공원 연결 승강기설치)

따로붙임:설계변경 내역서(총차,1차,2차) 및 설계변경자문의견서1부. 끝.