문서번호	시설보수과-2797
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	06/24 정훈모
협조
	주무관		이석근

『소화조 및 저류조 퇴적물 제거용역』

설계변경 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 및 저류조 퇴적물 제거용역』

설계변경 시행보고

우리 센터에서 시행중인 “소화조 및 저류조 퇴적물 제거 용역”의 및 물량 증·감 사항 및 분뇨처리시설 작업방법 변경 등에 따른 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 소화조 및 저류조 퇴적물 제거용역

○ 용역기간 : 2020. 02. 25. ~ 2020. 12. 31.

○ 도 급 자 : ************

○ 도 급 비 : ************

○ 용역개요 : *************

Ⅱ		보고내용

○ 설계변경사유

- 퇴적물 제거물량 증ㆍ감

- 분뇨처리시설 작업방법 변경(슬러지 제거 ⇒ 모래제거)

- 제3처리장 소화조 대상지 변경 : B-2-1 ⇒ B-1-1

○ 주요 설계변경 내용

공 종	위 치	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
제2처리장 소화조	9조	㎥	*****	*****	*****
제3처리장 소화조	B-2-1	㎥	*****	*	******
제3처리장 소화조	B-1-1	㎥	*	*****	******
분뇨동 제1유입 저류조	1,2지	㎥	*****	***	*****
분뇨동 저류조 #3	1,2지	㎥	***	***	*****
분뇨동 슬러지 저류조	1지	㎥	***	***	*****
탈수A동 저류조	1,2지	㎥	***	***	*****
탈수B동 저류조	1,2지	㎥	***	***	*

○ 설계변경 금액

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		***********	***********	-
도급비	공급가액	***********	***********	-
	부가가치세	**********	**********	-
	계	***********	***********	-

Ⅲ		조치계획

○ 상기 내용 등에 대하여 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 1. 설계변경 관련서류 각 1부.

2. 관련 문서 각 1부.  끝.