“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(2차) 시행에 따른 계약의뢰【2019년 강남구 관내 급수공사 등 건설폐기물 처리용역】

우리사업소에서 시행중인『************************************』에 대하여 설계변경(2차)을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : ************************************

나. 계 약 자 : ***************

다. 용역기간 : 2019.04.17. ~ 2020.06.30.

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감
계약 금액	공급가액	119,347,973	113,077,708	감)6,284,211
	부가세	11,934,797	11,307,272	감)627,525
	계	131,282,770	124,380,000	감)6,902,770

마. 설계변경 사유 : 계약물량 증ㆍ감 및 신규공종 발생에 따른 변경

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급,배수공사비, 신설공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 개조공사비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의

설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설 보수, 시설비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축, 소방용수시설 등의

설치 및 관리, 일반회계, 소방용수시설 설치, 시설비.

붙임 : 설계변경 관련문서 각 1부.  끝.

	급수운영과장
★주무관	손창기		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	06/24 代이승우
협조자
시행	급수운영과-10122	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)