투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(공기조화기) 납품기한 연기 요청(하남선 1공구 기계설비 공사)

우리본부에서 시행하고 있는 『하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)』에 소요되는 관급자재(공기조화기)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 변경내용

품명	납품요구번호	계약금액(원)	납품기한		계약상대자	비고
			당초	변경
공기조화기	121920608600	400,337,190	’20.07.31	’20.10.15	주식회사 에스앤에이치이앤지

나. 연기사유 : 하남선 개통일자에 납품기한을 맞추기 위함

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 감리단 관련 공문 및 합의각서 1부.

2. 분할납품요구 및 통지서 1부.  끝.

	도시철도설비부장
전문관	최수길		설비계획과장	代박명기		도시철도설비부장	06/25 김영수
협조자
시행	도시철도설비부-6138	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교동, 프리미어플레이스빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7295	/전송	02-772-7308	/	gosoo21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)