문서번호	급수운영과-10210
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강남수도사업소장
차승현	전동근	代이승우	06/25 박창석

설계변경(3차-최종) 및 정산보고 (2019년 수서동외 14개동 상수도공사)

2020년 6월

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	√	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	√	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	√	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	√	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	√	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	√	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	√	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	√	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	√	□

설계변경(3차-최종) 및 정산보고

(2019년 수서동외 14개동 상수도공사)

우리사업소가 시행하는 “2019년 수서동외 14개동 상수도공사”에 대하여 계약금액이 증액되어 본부심사 결과를 반영하여 설계변경 및 정산시행코자 아래와 같이 보고드림

□  개   요

□ 공 사 명: 2019년 수서동외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 계약기간: 2019.05.23.~2020.06.30.

□ 공사물량: D=13~300mm, L=2,661m

□ 도 급 액: 금1,124,900,000원

□ 추진경위

- 2020.06.22.: 설계변경 심사 요청(사업소 ⇒ 본부)

- 2020.06.24.: 계약금액조정 결과 통보(본부 ⇒ 사업소)

□  설계변경 사항

□ 설계변경 사유

- 신규공종 및 시공물량 증‧감 발생에 따른 설계변경(증액)

□ 설계변경 요약

구 분	공 종	금 액(천원)
*****	****************************	*********
*****	***************************	**************
*****	*************************	*************
*************		*************
*******		*************

□  설계변경 심사 결과

□ 심사 결과: ***********

- 환경보전비 삭제: 증빙자료 미제출

- 파쇄물 걷기 및 싣기 수량 조정: 당초 204㎥ ⇒ 수정 125㎥

- 환토재 할증 반영: 당초 2,136㎥ ⇒ 수정 2,384㎥

□ 조치의견

□ 심사결과를 반영하여 설계변경을 실시하고 준공정산코자함

구 분	당 초	변 경	증‧감	비 고
*****	*************	*************	*************	******
****	*************	*************	*************
*****	***********	***********	************

붙임: 1. 계약금액조정 검토서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.