문서번호	시설과-4911
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장		총무과장		관리부장
정성윤	이춘한		代이춘한		유연호		06/25 오성문
협 조

2020년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)설  계  변  경   시  행   보  고

2020.06

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

설  계  변  경   시  행   보  고

우리 대공원에서 시행중인 “2020년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)”에 대하여 물량 변경 및 신규공종 추가에 따른 설계변경을 시행코자 함

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020.2.17. ~ 12.31.

○ 공사내용

․ 주변전실 및 지구변전실 15개소 전기설비 관리

․ 업무시설 및 동물사 185동 전기설비 관리

․ 공원등 및 기타 전기설비 관리

○ 계 약 자 :****************

○ 계약금액 : ************

2		설계변경 내용

○ 주요 물량변경 내용

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증감
난연비닐시스 트레이용케이블	F-CV 4C 6㎟	m	200	400	∆200
450/750V 내열비닐절연전선	HFIX 1.78mm	m	200	2200	∆2000
450/750 내열비닐절연전선	HFIX 2.25mm	m	200	2225	∆2025
LED등기구 램프교체	55W	개	-	4	∆4
LED투광등기구 설치	100W이하	개	-	6	∆6

○ 설계변경 사유

․ 작업지시에 따른 물량증감 및 신규내역 반영

○ 주요 작업지시 내용

․ 전략기획실 분전반 신설 및 전등,전열공사 시행

․ 치유의 숲 간선이설 및 분전함공사 시행

․ 호주관 등기구 6등,투광등 2등 신설 및 배관,배선공사 시행

․ 동양관 등기구 신설 및 배관,배선공사 시행

․ 주변전실 분전반 1면 교체 및 배관,배선공사 시행등

○ 변경금액

구 분		당 초	변 경	증 . 감		비 고
도급비	****	***********	***********		-
	*****	**********	**********		-
	*	***********	***********		*

3		조치의견

○ 상기 변경내용과 같이 설계변경을 시행하고 기성을 지급하고자 함

4		행정사항

○ 설계변경에 따른 변경계약 시행 및 기성지급.   끝.