투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경시행(성수대교북단외2개소승강기설치공사-2차)

한강공원 접근성 향상을 위해 우리 본부에서 추진중인 “성수대교북단외2개소승강기 설치공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행 및 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 성수대교북단외2개소 승강기설치공사

나. 위    치 : 성수대교북단, 성수대교남단, 동작대교북단

다. 공사규모 : 승강기 및 계단설치2개소 및 비상계단 1개소설치등

라. 도 급 비 : 3,244,489,000원

마. 시 공 사 : 명남종합건설(주)외1개사

바. 공사기간 : : ‘19. 11. 4 ~ ’20. 12. 20

사. 설계변경 내용

구분	도 급 비
	총 차			1 차			2차
	당초	변경	증·감	당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
도급 비	3,244,489,000	3,279,320,000	증34,831,000	1,095,586,430	1,095,586,430	증감 없음	2,148,902,570	2,183,733,570	증34,831,000
공사 기간	‘19.11.4. ~‘20.12.20	변경없음		‘19.11.4.~ ‘20.6.30	“변경없음”		‘20.2.5.~ ‘20.12.20	“변경없음“

아. 변경계약사항: 총차(증액변경), 1차(내역변경),2차(증액변경)

자. 변경사유     : 차수별 물량조정 및 실정보고 사항 반영

차. 예산과목     : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,한강공원 접근시설 유지관리,시설비(한강교량 한강공원 연결 승강기 설치)

붙임  1. 보고서 1부.

2. 변경내역서(총차,1차,2차) 1부. 끝.

주무관							김일문			기반시설과장					06/25 라철흠
협조자
시행			기반시설과-2155									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257															/
전화		02-3780-0674						/전송			02-3780-0744					/	kim751515@seoul.go.kr												/	대시민공개