문서번호	도시철도토목부-6510
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목3과장	도시철도토목부장		도시철도국장
정병구	임병길	정대현		06/25 김진팔
협 조
	주무관		엄태용

「진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사」

시설공사 발주계획(2차) 검토보고

2020. 6

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사」

시설공사 발주계획(2차) 검토보고

『진접선(4호선 연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사』 감독권한 대행 등 건설사업관리용역사인 ㈜동명기술공단 으로부터 시설공사 발주(2차) 요청이 있어 이에 대한 검토  결과를 보고 함.

※ 동기공 제2020-3362호(2020.6.23.) 진접선 1공구 2차공사 발주 요청

1		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사

○ 규    모 : 총연장 5,669m(인입선 5,556m, 차량기지 113m)

· 단선터널 1,459m, 복선터널 4,097m, 환기구 2개소(수직구,경사갱)

○ 공사기간 : 전체: 2018.12.31.～2024.10.29. 1차분: 2018.12.31.～2020.8.31.

○ 총사업비 : 103,945백만원

(도급 90,948백만원, 관급 7,845백만원, 감리 3,803백만원, 보상 1,349백만원)

○ 도 급 자 : ㈜KCC건설 대표이사 정몽열

○ 사업관리단 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소 외 4개사

2		계약 및 발주 현황

(단위 : 백만원)

구 분		총 괄	기 발주 (1차-진행중)	금회 발주 (2차)	잔여분
공사비	도급비	90,948	4,000	4,900	82,048
공사기간		‘18.12.31 ~ ‘24.10.29	‘18.12.31 ~ ‘20. 8.31	‘20. 7. 1 ~‘21. 2.28

3		시설공사 발주계획(2차)

□ 공사기간 : ‘20. 7. 1 ~ ‘21. 2.28(8개월)

□ 금회 발주금액 : 4,900백만원

○ 공종 및 수량 (2차분)

구 분	공 사 규 모	단위	총물량	발 주 물 량			잔여물량
				기발주 (1차)	금회 (2차)	소 계
단선터널	B=6.0m, H=7.1m	m	1,459	-	-	-	1,459
확폭터널	A구간(D=16.3m) 86m B구간(D=12.1m) 35m	m	121	-	121	121	-
수직구·횡갱 (환기구#1)	수직구(D=11.8m) 58m 횡갱(B=7.5m,H=7m) 96m	m	154	106	48	154	-
복선터널	B=10.48m, H=7.5m	m	3,976	-	80	80	3,896
경 사 갱 (환기구#2)	D=8.8m, L=337m	m	337	33	304	337	-

○ 세부 공종별 발주 금액

(단위 : 백만원)

구 분	총괄금액	발 주 금 액			잔여분
		기발주(1차)	금회(2차)	소 계
1. 터널	56,652	2,150	3,430	5,581	51,071
1.1 단선터널	13,773	-	-	-	13,773
1.2 확폭터널	1,474	-	944	944	530
1.3 수직구 및 횡갱	3,132	1,312	268	1,580	1,552
1.4 복선터널	26,032	-	236	236	25,796
1.5 중간신호실#2	52	-	-	-	52
1.6 경사갱	4,983	504	1,543	2,047	2,936
1.7 인입선 종점부	443	-	-	-	443
1.8 터널부대공	6,763	334	440	774	5,989
2. 개착환기구	1,672	15	-	15	1,657
3. 수직구가시설	241	188	-	188	53
4. 가설공	5,948	792	286	1,078	4,870
5. 부대공	1,455	110	130	240	1,215
6. 차량기지	3,533	-	36	36	3,497
직접공사비 계	69,501	3,255	3,883	7,138	62,363
간접공사비	20,833	745	1,010	1,755	19,078
미확정설계공종(PS)	614	-	7	7	607
총공사금액	90,948	4,000	4,900	8,900	82,048

4		건설사업관리단 검토의견

○ 『진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인인선) 건설』 시설공사 발주금액, 공사기간 및 수량 적정성을 검토한 바 타당한 것으로 판단되며,

○ 환기구#1(횡갱), 환기구#2(경사갱)등 터널굴진 공정의 연속성을 감안 할 때 금회(2차분) 발주는 적절한 것으로 사료됨.

(2차분 주요 시공수량)

▸ 환기구#1 : 횡갱 굴진 48m, 인입선 확폭구간 121m

▸ 환기구#2 : 경사갱 굴진 304m, 복선터널 80m

▸ 종점부(차량기지) : 공사용 가도 200m

5		조 치 계 획

○ 『진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인인선) 건설』 시설공사 발주계획(2차)은2020년 사업예산 및 계획공정(10.4%)을 감안할 때 적정한 것으로 판단되므로,

○ 도시기반시설본부(총무부)에 계약의뢰 조치하여 목표공정 추진 및 예산집행에 만전을 기하고자 함.

- 예산과목 : (도시철도건설사업특별회계) 도시철도 건설, 도시철도건설사업, 진접선(4호선 연장) 차량기지 건설, 시설비

붙임 : 1) 건설사업관리단 공문 및 검토의견서 2부.

2) 발주설계서 1부.

3) 수량산출서 1부.

4) 예정공정표 1부. 끝.

[별첨 1]

작업구1(수직구, 횡갱, 확폭터널) 발주도면

*

작업구2(경사갱, 복선터널) 발주도면

*

작업구3 공사용가도 발주도면

*