투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사기간 연장 요청 승인 통보)

1. 업무지시현장: 천호지하차도 평면화 및 중앙버스전용차로 설치 전기공사 광명전판(주), 천호지하차도 평면화 및 중앙버스전용차로 설치 전기공사 주식회사천일

2. 작 성 일 자: 2020-06-25 11:06:02

3. 지 시 내 용

가. 천호평면화 제2020-116호(2020.6.18.)호와 관련입니다.

나. 「천호지하차도 평면화 및 중앙버스차로 설치 전기공사」와 관련하여 선행공정인 토목공사의 공기연장에 따른 전기공사의 기간 연장 요청에 대해 검토한 결과 건설사업관리단의 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하오니, 추후 설계변경시 반영하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 작업시 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							김문호			환경설비과장					06/25 김오열
협조자
시행			설비부-9100									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15층 (무교동)															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8621						/전송			02-3708-8659					/													/	부분공개(5)