문서번호	계획설계과-5942
결재일자	2020.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	계획설계과장		급수부장
권오정	송헌영		06/25 이규상
협 조

「배수지 등 구조물관리 개선방안 마련 용역」 설계변경 심의 결과 보고

2020. 6.

급수부(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「배수지 등 구조물관리 개선방안 마련 용역」

설계변경 심의 결과 보고

배수지 등 상수도 콘크리트 구조물의 성능과 기능 향상을 위한「배수지 등  구조물관리 개선방안 마련 용역」설계변경 심의 결과를 보고 드림

Ⅰ		현 황

□ 관련 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제44조

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정지치부 예규 제47호, 2018)

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 배수지 등 구조물 관리개선 방안 마련 용역

○ 사업기간 : 2019.5.3.~2020.6.30

○ 대상시설

- 염소 등에 접하는 콘크리트 구조물(정수지 6개소, 배수지 101개소)

○ 용역비 : 850백만원

○ 용 역 사 : ***************************

○ 사업내용

- 상수도 시설물(콘크리트 구조물)의 유지관리 실태, 기준 조사

- 상수도 시설물별 콘크리트 성능 및 품질관리 기준 제시

- 콘크리트 구조물의 성능 및 품질관리 개선방안 마련

- 시설물별 유지관리 방안(지침) 마련

Ⅱ		주요 변경 사항

□ 코어채취 및 시험

○ 변경 사유

- 콘크리트 코어 시험인 염화물함유량이 표면열화 주 원인이 아닌 것으로 조사되어 염화물함유량 시험을 감 조정하고, 흡수율, EPMA 실험 등으로 조정 필요

용역 중간 보고회(2019.12.9.) : 배수지 내부 구조물 내구성 저하 원인인 염해는 미미한 것으로 조사됨

□ 배수지 및 정수지 코어채취 132개소

➜ 시트 및 패널계 방수 코어채취 미시행

□ 콘크리트 코어시험(중성화깊이, 염화물함유량) 및 132개소

➜ 코어의 다양한 활용으로 항목별 코어시험 개소 조정

○ 변경금액

단위 : 천원

구분	수량		단위	발주금액	변경금액	중․감
	당초	변경
**************	***	***	**	******	******	*********

□ 콘크리트 시험(Mock-up 시험) 항목 조정

○ 변경 사유

- 신규 콘크리트 품질 확보를 위해 촉진탄산화저항성, 건조수축, 자기수축, 알카리-골재반응, 수화열 해석 등 추가 시험 필요

용역 착수 보고회(2019.7.30.) : 서울형 고내구성 수밀콘크리트 개발

□ 콘크리트 성능확보 확인을 위한 콘크리트 시험항목 조정

➜ 촉진탄산화저항성, 건조수축, 자기수축, 알칼리-골재반응, 수화열해석 추가수행

○ 변경 금액

단위 : 천원

구분	수량		단위	계약금액	변경금액	중․감
	당초	변경
콘크리트 Mock-up 시험	**	**	**	*****	******	********

Ⅲ		설계변경 소위원회 개최 결과

□ 설계변경 심의 개최

○ 인 원 : 5명

○ 구 성

- 위원장 : 계획설계과장

- 위  원 : ****************************************

○ 개최일 : 2020.6.25

○ 용역비 : 850백만원

□ 설계변경 심의 결과 : 타당함

(단위 : 천원)

구 분	수량		단위	계약금액	변경금액	중․감	심의결과
	당초	변경
계	***	***	**	******	******	*	타당함
**************	***	***	**	******	******	*********	타당함
***************	**	**	**	*****	******	********	타당함

Ⅳ		향후 계획

○ 변경내용을 설계서에 반영 : 2020.6.29

붙임 : 1. 설계변경 소위원회 심의 의결서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.