문서번호	도로관리과-10251
결재일자	2020.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		부속물관리팀장	도로관리과장
정수용		호경수	06/25 김진효
협조
	주무관		고동오

「도로부속물 유지관리이력 정보구축 및 실태평가 용역」

준공기한 연기 검토 보고

2020. 6.

안전총괄실

(도로관리과)

「도로시설물 유지관리이력 정보구축 및 실태평가 용역」

준공기한 연기 검토보고

본 용역과 연계사업인 ‘빅데이터 분석시스템 개발 용역(안전총괄과)’ 기간연장에 따른 시스템 결과 분석 및 실태평가 보고서 작성 등을 고려한 준공기한 연기 검토를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도로부속물 유지관리이력 정보 구축 및 실태평가 용역

○ 용역기간 : 2018.11.07.~ 2020.6.30

○ 용 역 비 : 71,250천원

○ 용 역 사 : 주식회사 동일기술공사, 케이에스엠기술(주)

□ 추진경위

○ ’18. 9.11. : 용역 추진계획 수립

○ ’18.11. 5. : 용역 입찰 조치계획 보고(수의계약 : 2차례 유찰)

○ ’18.11. 7. : 용역 계약 및 착수

○ ’19.12.17. : 준공기한 연기(’19.12.31 → ’20.6.30)

□ 주요 과업내용

○ 빅데이터 분석 시스템 개발 지원

○ 시설물 별 중장기 분석

○ 실태평가 보고서(익년도 및 중장기 관리계획) 수립

□ 보고내용

○ 준공기한 연기

용역기간	당 초	2018.11.07.~2020.6.30.
	변 경	2018.11.07.~2020.10.30.

○ 연기귀책 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

- 본 용역과 연계사업인 ‘기반시설 빅데이터 분석시스템개발 및 실태평가 총괄 용역(안전총괄과)’의 준공기한 연기에 따른 시스템 결과 분석 및 실태평가 보고서 작성 등으로 준공기한 연장 필요

※ 기반시설 빅데이터 분석시스템개발 용역 준공기간 연기(’20.10.30까지 : 안전총괄과)

□ 조치계획

○ 기반시설 빅데이터 분석시스템 개발 용역 연장기간에 맞추어 도로부속물 실태평가 준공기한을 연장하여 과업추진에 만전을 기하고자 함.  끝.