투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	조달청장(예산사업관리과장)
(경유)
제목	물가변동(1회)으로 인한 계약금액조정 사전 검토의뢰 [진접선(4호선 연장) 1공구(인입선) 건설사업관리용역]

우리 본부에서 시행중인 『진접선(4호선연장) 1공구(인입선) 건설사업관리용역』과 관련하여 물가변동으로 인한 총사업비를 조정하고자 사전 검토를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(장기계속)

나. 계약금액 : 3,803,200,000원

다. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내용(1회)

1) 계   약  금   액 : 3,803,200,000원

2) 적용제외계약금액 : 598,487,552원

3) 적 용 대 상 금 액 : 3,204,712,448원

4) 물가변동 조 정 율 : 7.58%

5) 물가변동 경과기간 : 445일 [기준시점(입찰일) : 2018.10. 2, 비교시점 : 2020. 1. 1.]

6) 물가변동 등락금액 : 242,917,000원

7) 선금급 공제금액   : 없음

8) 물가변동 조정금액 : 242,917,000원

붙임 1. 종합의견서 1부.

2. 물가변동 조정 보고서 1부.

3. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 참고자료 1부.(별도송부)  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	엄태용		토목3과장	임병길		도시철도토목부장	06/25 정대현
협조자
시행	도시철도토목부-6504	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 9층 도시철도토목부	/
전화	02-772-7235	/전송	02)772-7306	/	seoulite04@seoul.go.kr	/	대시민공개