문서번호	설비부-9182
결재일자	2020.6.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	06/26 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

2020. 06.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』관련, 건설사업관리단이 제출한 실정보고 사항을 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 일반2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  감리사/시공사 : *******************

□  공 정 률 : 48%(전선 입선 진행)

2		관련근거

□ 남산예장 감리 제2020-324(`20.6.25) : 건설사업관리단 실정보고서 제출

3		실정보고 내용

□  건축물 내부 실 구획 변경에 따른 전등수량 변경

□ 최종(`18.9월) 설계도서 납품시 관리실,펜룸,화장실,수유실 구획 변경

□  지장물로 인한 가로등 관로 일부 미굴착 구간 물량 제외

□  주관부서 요청에 의한 경관조명 연출계획 반영하여 좋은빛 심의 이행(`18.4월)

□  주요 변경 내역

공 종	변경내역	변경사유	변경금액 (단위:천원)
전등설비	·CD전선관22C 증)70m ·HFIX1.78mm 증)967m ·매입스위치 증)2개 ·등기구 설치 증)13개	건축 실구획 변경에 따른 물량 증감	증)2,176
가로등 설비	·CD전선관42C 감)156m ·F-CV 2C×6㎟ 감)320m ·관로굴착 감)182m ·가로등기초 감)2개소	지장물로 인해 관로 굴착 불가한 구간 물량 제외	감)5,696
공원등 설비	·CD-P전선관36㎜ 감)145m ·CD-P전선관42㎜ 감)334m ·F-CV 2C×6㎟×2열 감)668m ·공원등기초 감)15개 ·공원등주 설치 감)15개	주관부서 요청에 의한 경관조명 연출계획 변경 (붙임 공문 참고)	감)12,794
경관조명 설비	·CD-P 28㎜ 증)1,066m ·F-CV 2C×6㎟ 증)1,157m ·경관조명기구 설치 증)30개		증)15,202
기타공사 (냉난방, 제어설비)	·케이블 트레이 증)7m ·FTP케이블 증)20m ·RS-485케이블 증)20m	건축 실구획 변경에 따른 물량 증감	증)1,122
<직접비 계>			증)11
제경비 및 부가세			증)1,263
도급비			증)1,274
관급자재	가로등주 및 등기구		감)3,104
	실내조명등		증)1,824
합계(도급+관급자재)			감)6

□  건설사업관리단 의견

○ 타 공종(건축, 조경) 구조 변경으로 인한 전기물량 증감에 대한 도면 및 내역을         검토한 결과, 각 실별 전기설비의 신규설치 및 위치이동 사항은 공사진행을 위해         필요한 사항임. 증감물량은 기 계약단가, 신규단가에는 낙찰률을 적정하게               적용하였으며, 각항을 검토한 결과 적정하다고 판단됨.

4		보고자 의견

□ 건설사업관리자의 보고 내용은 건축 실 구획변경 및 지장물 등 현장여건에       따른 물량증감 사항으로, 현장확인 결과 보고내용이 적절하다 판단되므로       실정보고 승인하고 물량 변경되는 관급자재는 변경계약하고자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)주관부서 경관조명 연출 반영 요청 공문 1부. 끝.