투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 일시중지 알림(아동복지센터 전기시설 개선공사)

1. 서울특별시 아동복지센터-7392(2020.06.25.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 공사 의뢰기관 아동복지센터에서 코로나19 확산 방지 사유로 공사 일시 중지 후 2020년 9월 1일 이후 작업 시행을 요청하여,

3. 우리 본부와 계약 체결한 귀 사에 공사 일시 중지를 요청하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 아동복지센터 전기시설 개선공사

나. 공사중지 시점 : 2020. 6. 25.

다. 공사재개 시점 : 2020. 9. 01.

라. 사    유 : 코로나19확산 방지

붙임 : 관련문서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	시공사 (주)신양 대표자,감리사 (주)필이엔지 대표자 귀하
주무관	이창근		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	06/26 임정규
협조자
시행	설비부-9166	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-2660	/	zoom4799@seoul.go.kr	/	대시민공개