문서번호	시설관리과-2241
결재일자	2020.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	시설부장
최재훈	김연배	한흥태	06/26 전영주
협 조

[잠원한강공원 노후 상수관 정비공사]

현안사항 실정보고

2020.6.26.

시설관리과

[잠원한강공원 노후 상수관 정비공사]

현안사항 실정보고

잠원한강공원 노후 상수관 정비공사와 관련하여 시공사(에스디원건설)로부터 ‘콘크리트깨기실정보고서 제출건’(2020-06호)이 접수되어 현안사항의 실정보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공사명: 잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사

□ 규  모: 노후 상수관 정비(D100㎜, L=1.5㎞)

□ 기  간: 2020. 3. 20. ~ 2020. 9. 30.

□ 공사비: 644,583천원

(도급비: 327,383천원, 관급비: 127,960천원, 이전비:189,240천원)

***********************

Ⅱ		현안 및 문제점

□ 전체 공사구간에 대하여 관로 부설시 콘크리트 포장층 발생

○ 당초 설계된 도로선형의 포장면 하부 기존 콘크리트 포장층 발생으로 콘크리트깨기(연장 약880m, 평균 두께 40cm) 신규 공종발생 및 이에 따른 건설폐기물 발생량 증가(약420㎥)

□ 각종 지장물 등으로 관로선형의 변경하기는 어려움

○ 시공중인 선형 외의 구간은 지하매설물 및 각종 시설로 우회 어려움

○ 주차장 입구, 교차로 등 혼잡구간 상존하여 계획선형으로 시공 필요

□ 현황사진

1구간 (연장L=588m 중 330m)

2구간 (연장L=890m 중 550m)

Ⅲ		조 치 계 획

□ 원활한 공사 추진과 향후 시설관리를 위하여 기존 계획 선형으로  시공을 완료토록 하며, 추가 발생하는 비용은 이전비 등을 활용

○ 추가 개략공사비: 90,000천원(※폐기물 처리비용 포함)

○ 예산현황

(단위: 천원)

총 예산	도급비	관급비	이전비	낙찰차액
700,000	327,383	127,960	189,240	55,417

- 예산과목: 한강공원 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

노후상수관 정비, 시설비

□ 상기와 같이 시행하고 향후 신규공종 등을 설계변경에 반영 및 발생되는 물량에 대하여 정산처리하고자 함.

붙임: 관련서류 1부(별첨).  끝.