문서번호	설비부-9189
결재일자	2020.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
임원성		이종근	06/26 임정규
협조

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(총차6회, 7차2회, 8차1회)시행 보고

2020. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(총차6회, 7차2회, 8차1회) 시행 보고

동부간선도로확장 2공구 책임건설사업관리단이 제출한 설계변경 및 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사개요

□  공사명: 동부간선도확장(2공구) 전기공사

○ 규모: 녹천교~상계주공 11단지 간(3.2㎞) 도로확장(4차로→6차로)

- 수전설비: 6,500kVA, 가로등: 169본, 터널등: 1,891등(도봉지하차도 2,980m)

○ 공사비: 15,389백만원(도급: 11,135, 관급: 4,008, 이전: 246)

○ ********

○ ***********

(단위: 원)

구분	계약금액	준공(기성)금액	공사기간	비고
**	***************	*************	**********************
***	************	***********	**********************	**
**	************	**********	**********************	**
**	************	**	**********************	****
**	***********	***********	**********************	**
**	************	***	**********************	****
**	***********	**	*********************	****
**	**************	**************	*********************	**
**	*************	***********	*********************	**

2		검토내용

□  관련근거

○ ‘설계변경(실정보고 3차, 표시등 배관) 검토 보고’(설비부-2960호, 2020.2.28.)

○ ‘계약금액조정(물가변동) 검토 보고’(설비부-5764호, 2020.4.20.)

○ ‘설계변경(실정보고 4차) 검토 보고’(설비부-8612호, 2020.6.17.)

○ ‘동부간선도로확장(2공구) 전기공사(설계변경) 계약심사 결과 통보’(계약심사과-10956호, 2020.6.23.)

○ ‘설계변경(총차5회, 7차2회, 8차1회) 및 물가변동 계약금액 조정 검토보고’(책임건설사업관리단 이산2020-4067호, 2020.6.25.)

□  변경내용

○ 계약금액

(단위: 천원)

총차(6회)	당초	변경	증감	비고
**	**********	**********	************
			************	****** *******
****		**********
	**********
			************
		*********
****

○ 거리표시유도등 및 시선유도등 배관방법 변경 반영

- 실정보고(3차): ***********

○ 도봉지하차도 관리사무소 증축관련 전기공사 변경 외 4건 변경 반영

- 실정보고(4차): ************

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 반영

- 계약금액조정(물가변동) 검토 보고: **************

(단위: 천원)

7차(2회)	당초	변경	증감	비고
**	*********	*********	************
			************
****		*********
	*********
			************
		*******
****

○ 실정보고(3, 4차) 내용 중 7차분 반영*************

○ 선행공정 단계별 시공으로 7차 공사 중 방재설비등을 8차 공사로 조정

- 전체분 수량 증감없이 7차분에세 제외**************

○ 선행 마들로 공사 및 교통신호등 규제 지연으로 가로등공사, 신호등공사 제외

- 전체분 수량 증감 없음**************

○ 7차 계약분 물가변동대상금액에 의한 ES 정산금액*********** 반영

(단위: 천원)

8차(1회)	당초	변경	증감	비고
**	*********	**********	************
			************
****		*********
	*********
			************
		*******
****

○ 실정보고(3, 4차) 내용 중 8차분  반영***********

○ 선행공정 단계별 시공으로 7차 공사 중 방재설비등을 8차 공사로 조정

- 전체분 수량 증감 없음**************

○ 8차분 물가변동 계약금액 조정금액*********** 반영

○ 공사기간(변경없음)

- *********************************

- **********************************

- **********************************

3		검토결과

□  건설사업관리단 검토의견

○ 총차(6회), 7차(2회), 8차(1회)에 대한 설계변경 건을 검토한 결과 설계변경 도서는 계약심사과 심사결과 내용대로 적정하게 반영됨.

○ 7차 공사중 도봉지하차도 관리사무소 사업계획(증축)에 따른 지하차도 전기실 설계변경분과 선행공종(토목) 단계별시공으로 지하차도 방재설비등이 8차 계약분으로 수량조정 되었으며, 마들로 선행공종(토목) 지연에 따른 7차 계약분 가로등공사와 신호등공사의 미시공 부분을 총차분으로 수량 조정이 타당함.

○ 전체공사의 물가변동의 계약금액 조정 요청 금액****************중 7차분에 대한 물가변동 조정금액**************이 적정하게 산출(정산) 되었으며,

○ 총차 및 8차분에 대한 물가변동에 의한 계약금액 조정은 설계변경, 정산 등 ‘물가변동 적용대가’의 변경이 있는 경우 상기 조정 금액의 정산이 필요함.

□  보고자 의견

○ 동부간선도로확장 2공구 책임건설사업관리단이 검토한 변경도서 내용이 적정한 것으로 판단되어 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임: 1. 책임건설사업관리단 검토보고서 1부 .

2. 설계변경 내역서 3부.

3. 설계변경 계약심사 결과서 1부.

4. 합의서 3부.   끝.