설계변경(2차) 심의 의결서

공사명: 2019년 노원구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

의 뢰 부서명	북부수도사업소 급수운영과
공사 담당	지방시설주사보 안윤자
검토 의뢰일	2020. 6. 29.(월)

검 토 의 견 서

○ 공 사 명: 2019년 노원구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 검토일시: 2020.06.29. 15:00

○ 심의(검토)내역

- 신규공종 산출 적정성 여부

- 물량 변동의 적정성 여부

- 관련 규정 및 적법성 여부

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

유승효

06/29

유승효

적정함

위    원

시설운영팀장

박미영

박미영

적정함

위    원

주무관

이한수

이한수

적정함

위    원

급수관리팀장

최용진

최용진

적정함

위    원

주무관

윤승구

윤승구

적정함

담    당

주무관

안윤자

안윤자

설계변경(2차) 사유서

1. 공사현황

가. 공 사 명: 2019년 노원구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요: D = 13 ~ 300mm, L = 1,557m

다. 공사기간(계약일): 2019.06.02. ~ 2020.06.30.

********* *************

************************

2. 설계변경 금액

구 분		당 초	변 경	증·감
도급비	공급가액	746,880,937원	830,454,546원	증)83,573,609원
	부가세	74,688,093원	83,045,454원	증)8,357,361원
	계	821,569,030원	913,500,000원	증)91,930,970원

3. 설계변경 사유: 현장여건 변경에 따른 물량 증·감 및 신규공종 발생

가. 공종별 금액변동

구 분	당 초	변 경	증·감
토 공	171,678,326원	226,068,102원	증)54,389,776원
부 설 공	131,690,374원	150,408,658원	증)18,718,284원
구조물공	38,124,655원	31,070,132원	감) 7,054,523원
부 대 공	9,456,447원	9,117,644원	감) 338,802원
포 장 공	62,063,162원	79,520,147원	증)17,456,985원
사급자재비	95,958,456원	105,248,848원	증) 9,290,392원

나. 물량 증·감 및 신규공종

구 분	당 초	변 경
토 공	콘크리트 포장 절단 1,304m 등 41개 아스팔트깨기(소형) 76㎥ 등 32개 (신규)	콘크리트 포장 절단 1,428m 등 41개 증 아스팔트깨기(소형) 69㎥ 등 32개 감 인력터파기(협소,야간) 3㎥ 등 2개
부 설 공	- 스테인레스관부설공(20㎜) 19m 등 85개 - 주철직관부설공(200㎜) 99m 등 123개 (산규)	- 스테인레스관부설공(20㎜) 65m 등 85개 증 - 주철직관부설공(200㎜) 78m 등 123개 감 보호통보온재및뚜껑 설치 77개소 등 16개
구조물공	원형밸브실(100㎜) 설치공 18개소 등 4개 대형계량기실 설치(75㎜) 2개소 등 2개 (신규)	원형밸브실(100㎜) 설치공 27개소 등 4개 증 대형계량기실 설치(75㎜) 1개소 등 2개 감 중형밸브실설치공(80㎜) 1개소 등 4개
부 대 공	- 하수도복구공(PVC100㎜) 7m 등 21개 가설사무실 설치 1개소 등 26개 (신규)	- 하수도복구공(PVC100㎜) 20m 등 21개 증 가설사무실 설치 -개소 등 26개 감 가설급수장치 본관설치 철거 2개소 등 2개
포 장 공	보조기층공(t=10㎝) 1.5a 등 3개 con-인력비빔 타설 0.5a 등 4개	보조기층공(t=10㎝) 2.23a 등 3개 증 con-인력비빔 타설 0.39a 등 4개 감
사급자재비	- 환토재 1,369㎥ 등 42개 - 이형관 56kg 등 67개 - (신규)	- 환토재 1,690㎥ 등 42개 증 - 이형관 -kg 등 67개 감 부단수할정자관(100/80㎜) 등 11개

4. 조치계획

상기 공종에 대하여 설계변경 심의위원회 심의결과에 의거 붙임내역과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

붙 임   1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 요구서 및 검토의견서

3. 계약금액조정 결과 통보서(본부 안전총괄과) 1부. 끝.