문서번호	하천관리과-3953
결재일자	2020.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수설비팀장	하천관리과장
최병희		이문주	03/12 한유석
협조

특정기술 선정 심사위원회 상정 검토보고

(흑석빗물펌프장 이전 기본 및 실시설계 용역)

2020. 03.

물순환안전국

(하천관리과)

특정기술 선정심사위원회 상정 검토보고

- 흑석빗물펌프장 이전 기본 및 실시설계 용역 -

흑석빗물펌프장 이전 기본 및 실시설계 용역 관련 흙막이벽, 비개착 추진 공법 선정을 위한 특정기술 선정심사위원회 상정 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

❍ 건설공사 공법선정 투명성 제고 방안(행정2부시장 방침 제38호, ‘16. 2.15)

❍ 특정기술 선정 및 적용방법 개선 계획(기술심사담당관-11933, ‘19.6.26)

❍ 특정공법 심사를 위한 흑석펌프장 이전 기본 및 실시설계 관련 공법 전수조사 보완(한국종합 2020-03-404. ‘20. 3. 11)

- 특정기술 선정심사자료 제출

Ⅱ		사업개요

❍ 위     치 : 동작구 흑석동 1-2번지 일대

❍ 규    모 : 부지면적 7,353㎡, 펌프장 신설 1.760㎥/분, 유수지 용량 21,000㎥

❍ 기    간 : ‘19.5.7. ~ ’23.12.(용역기간 ‘19.5.7~’20.4.30)

❍ 총사업비 : 84,000백만원(용역비 1,400백만원)

Ⅲ		추진경위

❍ ‘19.04 : 용역계약

❍ ‘19.05 : 착수보고회 및 자문회의(1차)개최

❍ ’19.11 : 자문회의(2차)

❍ ‘20.03 : 특정공법 심사를 위한 흑석펌프장 이전 기본 및 실시설계 관련 공법 전수조사 보완 제출(용역사)

Ⅳ		검 토 내 용

□ 적용 구간(흙막이벽공법, 비개착추진공법)

구 분	위 치	내 용	비고
흙막이벽공법	흑석동 2-2	유수지(A=3,900m2) 흙막이벽공법 적용
비개착추진 공법	흑석동 6-24	흑석역 신설횡단관로(L=126m) 비개착추진공법 적용

□ 특정공법 적용 검토

○ 심의 상정대상

구분	대상공법	적용구간	비고
1	흙막이벽 공법	흑석동 2-2
2	비개착추진 공법	흑석동 6-24

○ 특정공법 대상 업체 선정 기준

구 분	대상공법	적용구간	비고
선정기준	⦁건설알림이 등록업체	⦁신용등급(CCC 이상)
	- 현장적용가능 형식 선정	⦁참여의사 여부
		⦁기술공법 적용성 여부

❍ 현장여건 고려

- 굴착심도 H=10.0m ~ 15.0m, 하천인근 지역(지하수 영향), 공간협소 등)

- 대구경(3,300mm 이상) 관로 설치 가능여부

- 시공이 가능한 공법 중 시공성, 경제성, 유지관리성 등을 고려하여 공법 선정

Ⅴ		용역사(사업책임기술자)검토내용

□ 일반·특정기술 검토결과

❍ 공법 전수조사 현황

구 분	계	특허공법	일반공법	비 고
흙막이벽공법 건수	14	14	-
비개착추진 공법 건수	31	31	-

※ 서울특별시 건설알림이 정보 검색 서비스(http://cis.seoul.go.kr) 확인

❍  특정기술 심사대상 현황

**	**	********	***	*****	********	****
******	*	*********** **************************************	********	** ************	*	*
	*	******************************************	**********	***************	*	******
	*	***************************************	********* *****	***************	*	*
	*	********** ***********	*******	***************	*	*
*******	*	**************** ****************	*******	***************	*	******
	*	**************************	*********	***************	*	*
	*	**********	********	***************	*	*
	*	**********	*******	*** ************	*	*

※ 설계용역사 검토결과 현장적용이 가능하고 참여의사가 있는 모든공법에 대하여 심사대상으로 선정

□  사업책임기술자 검토의견

○ 흙막이벽 공법

- 본 현장은 지표하 GL(-)15.8~16.0m까지 N값 3/30~20/30이하(매우 느슨~보통)의 퇴적층이 분포하고 있으며,

- 인근에 사유지 및 흑석초등학교가 위치하고 있어 소음 및 진동이 적은 공법선정이 필요하며,

- 서울시 건설알림이에 등록된 기술공법 14개중 벽체강성이 우수하며, 소음 및 진동이 적은 공법 3개 업체를 특정기술 선정심사위원회 심의에 상정함

○ 비개착추진공법

- 유수지 유입관로 상부는 도심지 도로 및 흑석역(9호선)으로 이용되고 있어 개착이 불가한 실정이며,

- 흑석역 및 상부 사유지 건물과 흑석초등학교가 위치하고 있어, 지상설비 설치공간이 협소하여 지상설비 설치공간이 최소화 될 수 있는 공법선정이 필요하며,

- 서울시 건설알림이에 등록된 기술에 대해 현지여건을 고려하여 3개 업체를 특정기술 선정심사위원회 심의에 상정함

Ⅵ		조치계획

❍ 용역사(사업책임기술자) 특정공법 전수조사 검토결과에 따라 ‘특정기술 선정심사위원회“에 심의대상 공법 상정

붙임 : 용역사 검토의견서(공법비교표) 각 1부.