코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	서울시 노인보행사고 다발지역 진단 및 설계용역 변경계약 요청

「서울시 노인보행사고 다발지역 진단 및 설계용역」계약기간 연장사유가 발생하여 다음과 같이 변경계약코자 합니다.

가. 용역개요

1) 사업명 : 서울시 노인보행사고 다발지역 진단 및 설계

2) 대  상 : 최근 3년 간 노인보행사고 5건 이상 발생 10개소

3) 사업비 : 87,999,000원.

4) 기  간 : ’20. 2.10. ~ 6.10.(4개월)

5) 용역수행자 : ㈜ 태조엔지니어링

나. 변경사항

1) 사업기간 : 1개월 연장(과업종료일 6.10. → 7. 10.)

2) 사   유 : 용역 계약 직후 코로나19 대유행으로 현장조사, 기관협의 등 필수 공정이행이 물리적으로 불가

3) 지연배상금 : 해당없음

- 행정안전부 예규 제88호 8절 8호 가목에 따라 불가항력으로 발생한 손해 중 전염병에 해당

- 7절 1호 다목 1)에 따라 제8절 8 정한 불가항력의 사유에 따른 경우 ‘지체일수’에 포함하지 아니함.

붙임. 1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

							보행정책과장
교통전문관							김종민			보행안전팀장					김성국					보행정책과장					06/08 박태주
협조자
시행			보행정책과-7959									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-2133-2425						/전송								/													/	부분공개(6)