문서번호	시설관리과-2273
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장		한강사업본부장
김연배	한흥태	전영주		06/30 신용목
협 조
	총무부장		기봉호
	총무과장		이상이
	기획예산과장		문영일

반포 한강공원 노후 상수관 정비공사 설계변경(최종) 시행보고

2020.06.

시설부 시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『반포 한강공원 노후 상수관 정비공사』

설계변경(최종) 시행 보고

『반포 한강공원 노후 상수관 정비공사』에 대하여 공종별 물량 증․감 및 신규공종 발생에 따라 설계변경(최종)을 시행하여 공사 준공에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 반포 한강공원 노후 상수관 정비공사

□ 공사내용 : 상수관 정비 D100mm, L=2.1km

□ 사 업 비 : 930,872천원

○ 도급비 476,626천원, 관급비 108,430천원, 이전비 345,816

□ 공사기간 : 2020. 3. 16 ~ 2020. 06. 30

□ 도 급 자 : 숭일건설(주) 대표 이충언

Ⅱ		설계변경 사항

□ 설계변경 사유

○ 공종별 물량 증·감 및 신규 공종 발생

○ 안전사고 예방을 위한 주간공사를 야간공사로 변경(시설관리과-1197)

□ 수량 변경

공 종	단위	수 량		비 고
		당초	변경
관부설(13~25mm)	m	661	738	증 77
관부설(100mm)	m	2,136	2,145	증 9
아스콘 포장	@	2.2	5.77	증 3.57

□ 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비	930,872,610	889,083,170	감41,789,440
도 급 비	476,626,110	705,925,500	증229,298,890
관급자재비	108,430,500	128,826,310	증20,396,310
이 전 비	345,816,000	54,331,360	감291,484,640

Ⅲ		조치계획

□ 상기와 같이 설계변경 시행하여, 공사 준공에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 현안사항 보고서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.  끝.