문서번호	정수과-3009
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	06/30 代이혜진
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

배출수처리시설 분배조 퇴적물 준설 설계변경

2020. 6.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

배출수처리시설 분배조 퇴적물 준설 설계변경

배출수 처리시설 퇴적물 준설 용역 시행 중 준설대상 추가발생 등으로 계약물량이 증가되어 설계변경 시행코자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 배출수처리시설 분배조 퇴적물 준설

○ 용역기간 : 2020.6.22. ~ 7.2.

○ 계약금액 : ***********

○ 용역업체 :*********************************

○ 용역내용 : 배출수처리시설 분배조 2개소의 퇴적물 준설

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 준설대상 추가발생으로 계약물량 증가 : #2착수정 정류벽 후단 준설 추가

- 2정수장 착수정 정류벽 후단 부분의 퇴적물량은 착수정 기능 저하 및 펌프 등의 시설물 손상 우려를 해소하기 위해 준설이 필요함.

- 준설용역 계약 이후 퇴적물을 반출할 수 있는 출입문이 설치되어 진공흡입차에 의한 준설이 가능하므로 정류벽 후단 퇴적물을 설계물량에 추가 반영하여 준설.

2정수장 착수정 정류벽 뒤 퇴적물	퇴적물 반출 출입문 설치

○ 설계물량 변경에 따른 계약기간 연장 및 계약금액 변경

□ 설계변경에 따른 계약변경 내역

계약금액	당 초	********************
	변경후	**********************
	증․감액	**********************
계약기간	당 초	2020.6.22.~2020.7.2.
	변경후	2020.6.22.~2020.7.17.

□ 조치의견

○ 위 변경 내용에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경 시행코자 함.

○ 설계변경 심의위원회 개최

- 심의일시 : 2020.6.29.(목) 16:00~

- 심의장소 : 정수과 사무실

- 심의내용 : 설계변경의 타당성, 제경비 산정 및 적용 적정성 여부,

물량변동의 적정성 여부, 각종 제반 규정 준수여부 등

- 위    원

구 분	직 급	성 명	비 고
위원장	****	*******
위 원	****	*******
위 원	****	*******
위 원	****	*******
위 원	****	*******

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 심의의견서(서식) 1부.  끝.