“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2019년 구로1동 외 6개동 상수도공사)-2회(최종-2차수)

우리사업소에서 시행하고 있는 『2019년 구로1동 외 6개동 상수도공사(단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회-최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 2019년 구로1동 외 6개동 상수도공사(단가계약)

나. 도 급 자: ***************

다. 공사기간(2차수): 2020.1.1.~2020.6.30.(총부기기간:2019.7.3.~2020.6.30.)

라. 예산과목

- 상수도사업비,영업비용,급수공사비,신설공사비

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,기타교체비

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비(지원사업성시설비)

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도관 정비,노후밸브정비)

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축(소화전신설,보수)

마. 설계변경 사유 : 신공종 및 공종별 계약물량 증․감 발생

바. 설계변경(1회) 내역                                                (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증,감	비 고
도급액	소 계	***********	***********	**************
	공급가액	***********	***********	**************
	부 가 세	**********	**********	*************

사. 차수별 부기금액 변경 내역                                          (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고(공사기간)
도급액	총 부기금액	***********	***********	**************	********************
	1차 부기금액	***********	***********	***	*********************
	2차 부기금액	***********	***********	**************	*********************

붙임  1. 설계변경 계획 보고서, 설계변경 내역서 각 1부.

2. 검증서, 심의 결과서, 합의서 각 1부.  끝.

주무관	김정운		급수운영팀장	문병희		급수운영과장	代문병희		강서수도사업소장	06/30 정진일
협조자
시행	급수운영과-13288	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3948	/전송	02-3146-3989	/	jwjw5011@seoul.go.kr	/	부분공개(5)