문서번호	조경과-8918
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경협력팀장	조경과장
유승아	김상주	06/30 문길동

2020년 공동체정원 조성 주민제안사업

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(서대문구)

2020. 6.

푸른도시국

[조 경 과]

2020년 공동체정원 조성 주민제안사업

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(서대문구)

2020년 공동체정원 조성 주민제안사업 지원 관련 보조금 단체의 예산 집행계획 변경에 대하여 자치구로부터 변경 승인 요청이 있어 검토보고 드림

□ 지원사업 개요

❍ 사 업 명 : 서대문 소셜가드닝 ‘더불어 숲’

❍ 지원단체 : 서대문 50플러스 센터

❍ 대 상 지 : 서대문구 통일로 484 유진맨션 일대

❍ 사업내용 : 노후화된 유진맨션 정원환경 개선 등

***********************************************

❍ 협약 자치구 : 서대문구(공원녹지과)

	2020년 공동체정원 조성 주민제안사업(보조금분야)
❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 11. ❍ 선정단체 : 24개 자치구 49개 공동체 ❍ 총사업비 : 700백만원(자치단체경상보조금) ❍ 사업내용 : 생활 속 꽃과 나무를 심고 가꾸는 공동체에게 보조금 지원

□ 변경사항

❍ 변경내용 : 사업계획 변경으로 인한 재료비(기반조성 재료비) 항목

예산 집행계획 변경(총사업비 10% 이상)

❍ 변경사유

- 동절기 유지관리 등에 대한 부담으로 간이온실 조성을 변경하여 철제화분 설치 및 화단조성용 흙 구입비로 변경

❍ 세부 변경사항

(단위 :천원)

비 목	세부항목	보조금		자부담		비고
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
계
재 료 비	식물재료비	4,400	4,400	600	600
	기반조성재료비	11,600	11,600	-	-
사업진행비	식비 등	-	-	1,040	1,040
활동비	간담회비 등	-	-	360	360

❍ 자치구 검토결과

- 공동체정원 조성 보조금 사업 추진 단체의 의견을 수용, 별도 의견없음

□ 검토결과

❍ 예산 변경액이 총 보조사업비의 10%이상이나, 외부여건 및 단체 사정으로 사업내용 및 예산 집행계획이 변경되는 사항으로

❍ 변경내용이 유진맨션 일대 정원조성이라는 사업 추진목적에 부합함으로

반영함

□ 향후계획

❍ 검토결과 및 변경승인 통보(시 → 서대문구)

붙임 : 자치구 공문 1부.  끝.