투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하남선(5호선연장) 2단계 구간 사전점검 추진계획 통보

서울특별시도시기반시설본부 도시철도설비부-3809호(2020. 4. 6.)와 관련입니다.

2. 철도종합시험운행 시행지침 제8조에 따라 하남선(5호선 연장) 2단계 구간에 대한 사전점검 추진 계획을 통보하오니, 해당 부서(기관)는 사전점검 추진에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 사전점검 추진 주요내용

가. 사전점검 기간 : 2020. 7.15(수) ~ 7.23(목)

나. 점검자 및 입회자 : 서울시(본부) 및 경기도 분야별 담당자, 철도운영자, 감리단, 시공사 등

다. 점검대상 : 하남선(5호선연장) 2단계 구간 철도시설물(H1정거장 포함)

라. 착수 및 종료회의

구 분	착수회의	종료회의	비 고
일 시	2020. 7.15(수) 10시	2020. 7.23(목) 15시
장 소	하남시 시스템통합감리단 회의실
참석자	서울특별시청(본부) 및 경기도청 분야별 담당자, 철도운영자(승무시스템처, 하남선운영준비단), 하남선 1-1, 4∼5공구 감리단장 및 시공사 현장대리인, 시스템통합감리단장

마. 서류제출

구 분	제출내용	제출일	제출방법
서울시, 경기도, 철도운영자	사전점검표, 보완계획서	당일 점검후 즉시	담당자 메일로 PDF파일 송부
	철도시설 기술기준 점검표	2020. 7.21까지
1-1, 4-5공구 감리단, 및 시공사, 시스템통합 감리단	공종별 시험결과 보고서 (첨부서류 포함) 출력물(제본) 3부. CD 1부.	2020. 7. 8까지	시운전상황실 (상일동역)
			담당자 메일로 PDF파일 별도 송부
	1-1, 4∼5공구 철도시설 추진 현황(완료여부 확인)	2020. 7.21까지	담당자 메일로 송부
	사전점검에 따른 해당 공구, 시스템분야 안전관리계획 별도 수립	2020. 7. 8까지

바. 담당자 메일 : 차량과 이재돈[leejdkk@seoul.go.kr]

붙 임 하남선(5호선 연장) 2단계 구간 사전점검 추진계획(점검자 등 포함) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도시철도토목부장,도시철도건축부장,경기도지사(철도건설과장),경기도지사(철도운영과장),하남시장(도시개발과장),서울교통공사사장(승무시스템처,하남선운영준비단),하남선(5호선연장) 1-1, 4-5공구 감리단장, 현장대리인, 하남선시스템통합감리단장
주무관	이재돈		차량과장	강치석		도시철도설비부장	전결 06/30 김영수
협조자
시행	도시철도설비부-6275	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7289	/전송	772-7308	/	leejdkk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)