문서번호	시설과-5019
결재일자	2020.6.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장
김용주	06/30 代이춘한
협 조
	주무관		배진수

해양관 돌고래이야기관 조성

건축공사 준공정산 보고

2020. 6.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

해양관 돌고래이야기관 조성

건축공사 준공정산 보고

해양관 돌고래이야기관 조성 공사에 대하여 경미한 물량증감 및 보험료 등 제경비에 대하여 준공정산 하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 해양관 돌고래이야기관 조성 건축공사

□ 계약금액 : ***********

□ 공사기간 : 2019. 10. 31. ~ 2020. 6. 26

□ 계 약 자 :**************

□ 공사내용

○ 지하1층

- 장비 반입구 신설

- 돌고래 전시수조 경사로 및 계단설치

○ 1층

- 해저터널 설치

- 돌고래 전시수조 전시시설 설치

- 돌고래 대기풀에 전시장 설치

○ 관람석

- 에어돔 철골 및 천막철거

- 관람석 의자철거, 바닥방수, 의자 일부 재설치 등

Ⅱ		물량증감 및 정산내용

□ 1층 장애자 화장실 소변기 1개 추가설치

○ 현    황 : 장애자 남자 화장실에 소변기가 없어 불편이 예상 됨

○ 조치방안 : 소변기 1개를 추가설치하여 불편 해소

○ 소요예산 : 소변기 1개 × 2,800천원 = 2,800천원

□ 공무직 휴게실 알람밸브실 설치

○ 현   황 : 2층에 공무직 휴게실 및 소방시설 설치에 따라 알람밸브실에 방화벽 설치 필요

○ 조치방안 : 알람밸브실을 조적벽으로 방화구획을 하고자 함

○ 소요예산 : 알람밸브실 1개소 × 2,700천원 = 2,700천원

□ 장애자 점자블록 등 수량 정산

○ 현   황 : 장애자 점자블록이 설치완료 됨

○ 조치방안 : 장애자 점자블록 설치후 잔량은 정산하고자 함

○ 소요예산 : 감4,900천원

□ 보도블록 보수, 안전난간 보완공사 등 추가공사 시행

○ 현   황 : 보도블록 일부 침하부분 발생, 전시수조 안전난간 충돌로 인한 위험 부분 발생

○ 조치방안 : 보도블록 노후로 인한 침하부분을 보수하고, 안전난간에 대하여는 보완공사를 시행하고자 함

○ 소요예산 : 5,300천원

□ 관람석 의자 도장

○ 현   황 : 기존 관람석 의자를 재설치 하는 부분의 의자 철재부식

○ 조치방안 : 관람석 의자 도장을 하여 내구성 확보 및 미관을 개선 하고자 함

○ 소요예산 : 60줄 × 50천원 = 3,000천원

□ 보험료 등 제경비 정산

○ 현   황 : 건강보험료, 연금보험료, 퇴직공제부금, 환경보전비 등 제경비 감액발생

○ 조치방안 : 보험료 등 제경비 지출부분을 확인후 잔액에 대하여 정산하고자 함

○ 소요예산 : 감31,648천원

Ⅲ		소 요 예 산

□ 소요예산 : 감22,748천원

구 분	소요예산(천원)
1층 장애자 화장실 소변기 1개 추가설치	2,800
공무직 휴게실 알람밸브실 설치	2,700
장애자 점자블록 등 수량 정산	감4,900
보도블록 보수, 안전난간 보완공사 등 추가공사 시행	5,300
관람석 의자 도장	3,000
건강보험료	감7,600
연금보험료	감20,848
퇴직공제부금 등	감3,200
합 계	감22,748

□ 예산과목

○ 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 생태적동물사조성 및 전시환경 개선, 시설비및부대비, 시설비

Ⅳ		조 치 사 항

□ 위와 같이 시설 보완공사 시행 및 보험료 등 제경비 감소분에 대하여 정산 내역에 의거 준공조치하고자 함

붙임 : 정산설계변경 내역서 1부.  끝.